과 업 지 시 서

경기도박물관 리뉴얼 건축공사

2019년 11월

경기도박물관

1. 과업 명칭

경기도박물관 전시실 리뉴얼의 건축공사

2. 과업 목적

경기도박물관 전시실 리뉴얼의 일환으로 전시 및 인테리어, 기계 설비, 철거 등      박물관 전시 환경을 개선하기 위한 공사임.

3. 공사 개요

가. 공 사 명 : 경기도박물관 전시실 리뉴얼의 건축공사

나. 과업범위 : 별도 붙임의 내역서 및 도면 참조

4. 과업 기간

가. 본 과업의 기간은 착공일로부터 180일로 한다.(전시실 공사기간)

나. 상기 과업기간은 절대공기이며 토·일요일 공휴일을 포함한다.

단, 절대공기를 위한 토·일요일 작업은 수급자의 판단에 의하며 작업으로 인한

추가비용은 수급자 부담 원칙으로 한다.

5. 일반 사항

가. 수급자는 공사과정에서 발주처의 업무협조를 통해 본 공사를 성실히 수행

하여야 한다.

나. 수급자는 본 과업지시서와 내역서, 도면의 내용에 충실하며, 관련법령, 규정,

지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고, 안전에 유의하여야 하며 수행한

과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

다. 수급자는 본 과업 수행 전 발주처의 과업범위에 대한 수급자의 점검, 과업범위,

기타 현장 여건에 따른 추가적 사항의 확인 및 기술적 점검과 확인, 감리자와의

현장미팅 후 결함 등에 대하여는 계약이행전 최종 현장 후 계약에 임하며, 확인

미비와 이에 따른 착오는 전적으로 수급자의 책임으로 하며 이의를 제기하지

않는다.

라. 본 과업의 수행과정은 문서처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출근거 등을

천연색 사진으로 작업 전, 중, 후를 제출하여야 한다.

마. 본 공사의 시방서는 붙임을 적용한다. 이외 특이사항은 공사감독자 관리감독

또는 공사감리자를 통하여 적합하게 시공하여야 한다.

바. 공사 중 음주, 흡연 등 안전 및 풍기문란 행위 발생시 감독자는 즉시 공사

중지를 명할 수 있으며, 현장대리인은 원인 파악 후 재발방지책을 문서로

제출하여야 하며, 이로 인한 공사기간 연장으로 인해 발생하는 지체보상금은

전적으로 수급자의 부담으로 한다.

사. 반입자재는 감리자를 통해 현장 검수하고 사진대장을 별도 제출하여야하며,

최종 감독자의 확인을 득한다.

아. 철거공사 등 비산먼지, 소음과 관련한 부분은 충분한 검토 및 감독자, 감리자의

업무지시를 득하여 시행하며, 이를 어기고 공사하여 민원 등으로 발생되는

사안에 대하여는 전적으로 수급자의 책임으로 한다.

자. 관급자재 이외 사급자재는 감리자의 검수를 통하여 공사에 투입하고 관련

서류를 제출하며, 불합격 자재 또는 물품은 즉시 반출 조치하여야 하며 이를

이유로 과업기간을 연장 할 수 없으며 공사에 적용 또는 사용할 수 없다.

차. 본 공사 계약 후 3일 이내에 공사와 관련한 안전현황판, 무재해현황판, 현수막

등은 박물관 내□외부에 각각 다수를 설치하여야 하며, 설치개소 및 개수와

규격은 발주처와 협의한다.

카. 본 공사는 전시실 공사 완료 후(소방, 기계공사 포함) 수장고내 소방시설 교체공사는 전시실 준공이후 실시하여야 한다.(별도 공사기간 산정예정임)

6. 세부 지침

가. 수급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 본 과업을 수행한다.

나. 반입된 자재는 내역서에 준하여 입고되도록 하며 부득이 변경 시에는 사전에

감독자의 허가를 득하고 이를 어길 시에는 계약을 취소하고 타 업체가 시공

하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

다. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하고 공사로 인한 피해가 없도록

조치하며 본 공사로 인한 기존 시설물의 파손 발생시 원상 복구한다.

라. 전체적 조율은 공정회의를 통하여 조정하며, 전체 공정에 차질이 없도록

감독 및 감리자의 업무지시에 따라 공정을 관리 하여야 한다.

마. 다수의 공종이 동시에 작업할 수 있으므로 안전모, 안전조끼 등을 구분하여

착용하여야 한다.(공정회의때 별도 통보예정)

또한, 안전장구 미착용자는 현장에 진입하지 못하며 이를 어길시 즉시 퇴거

조치하며 이에 따른 불이익은 수습자 부담원칙으로 한다.

바. 공사에 필요한 기본적 전기, 수전 등은 제공하나, 공사와 무관한 전기 및

박물관의 부대설비의 사용은 공사감독자의 승인을 득한 후 실행하며 차후 정산을 통하여 계약금액에서 감액한다.

사. 공사기간 중 업무회의 및 다수의 회의에 반드시 현장대리인이 참석하여야 한다.

아. 일일작업일보 등은 매일 정시에 감독자 및 감리자에게 제출 후 작업에

임하여야 한다.

자. 작업과 관련한 소음, 공사차량의 진입 등은 공사 감독자 및 감리자와 사전

협의하여야 하며, 별도의 지시에 적절한 조치를 취하여야 한다.

차. 수급자는 발주처와 계약 후 7일 이내 공정표를 제출하여 승인을 얻어야 하며,

일일작업일보 등은 사진을 첨부하여 매일 정시에 감독자 및 감리자에게 제출

후 작업에 임하여야 한다.

카. 현장대리인계는 발주처 또는 감리자의 요청으로 변경할 수 있으며, 변경조건은

현장 미상주, 현장 통솔력 미비, 기술적인 미숙, 주요사항에 대한 발주처 및

감리자와의 업무협조 미비 등이 있을 경우에 한한다.

타. 도면에 기재된 지정 사양 또는 지정 마감은 감독자와 협의하여 결정한 후 설치한다.

파. 본 과업지시서에 명기하지 못하는 상세한 부분은 공사회의를 통하여 감독자

및 감리자의 지시에 의한다.

7. 감 독 자

본 과업에서 감독자라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며 공사의 전반적인

사항에 대하여 확인하는 발주처의 직원[감독자 (정)] 또는 그의 대리인[박물관 담당자 중 선임]으로 하며 아래와 같이 세분화 한다.

가. 감독자(정) : 공사감독관 및 계약담당관

나. 감독자(부) : 공사감리자, 자문위원

8. 감 리 자

가. 본 과업을 이행함에 있어서 공사일정, 설계도의 적합성, 설계변경의 주관,

기성금 등 준공처리 업무를 위해 감리자를 선임할 수 있다.

나. 수급자는 시공 중 공사와 관련된 부분에 대하여 감리자의 지시가 있을 경우

발주처에 확인하여 그 지시에 따라야 한다.

다. 수급자는 기성금을 신청할 때에는 감리자의 검수 확인 후 발주처에게 제출한다.

9. 자문위원

본 과업을 이행함에 있어 전시의 완성도를 높이기 위하여 전문성 있는 전시 자문위원을 별도 선임할 수 있으며, 수급자는 전시 자문위원의 지시가 있을 경우 발주처에 확인하여 그 지시에 따라야 한다.

10. 관련서류

수급자는 공사 착공전 착공계, 공정표 및 하자보증증권 등의 계약과 관련한 필요

서류를 제출하고 감독자 및 계약담당자의 승인을 받는다.

11. 설계변경

본 공사의 설계변경과 관련한 전반적인 사항은 반드시 공사감리자의 검토 및

승인을 통하여 진행한다.

12. 시운전

공사와 관련한 기기 등을 설치 후 반드시 시운전은 경기도박물관 운영직에 인수

인계를 하여야 하며, 교육을 3회 이상 동반하여야 한다.

13. 현장대리인

공사감독관 및 공사감리자와 업무협의가 가능하고 업무지시에 이행 가능하며

본 과업과 관련한 서류의 제출 등에 업무 적임자인 현장대리인을 선임하여 전체

기간 동안 반드시 상주하여야하며, 공사의 전반적 사항에 대하여 책임을 진다.

단, 발주처와의 업무협의 또는 업무지시에 대한 이행이 불충분할 경우 현장대리인의 교체를 요구할 수 있다.

14. 하자기간

가. 공사 완료 후라도 공사와 관련한 업무, 관련 자료의 제출 및 하자에 대하여는

그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.

나. 본 공사 완료 후 하자기간은 2년으로 한다.