심 사 결 과 서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 임학임산학관 리모델링공사(통신)

○ 위    치 : 수원시 권선구 서둔로 166

○ 공사내용 : 구내통신선로, CCTV, 방송 등

○ 공 사 비 : 864,756천원(도급 534,208, 관급 330,548)

○ 공사기간 : 계약일로부터 5개월(요청기관 : 경기문화재단)

□ 심사결과                                    (단위 : 천원)

심 사 대상액	심사액	조정액			조정률	비 고
		계	증액	감액
534,208	430,613	Δ103,595	0	Δ103,595	19.39%	관급 심사제외

□ 주요내용

○ 일위대가 및 단가산출 등 조정 : 7종

- 터파기	- 파이프행가(앵커볼트)

- 케이블 동시 포설	- 매입 배관 변경 등

□ 기타

○ 2020년 상반기 건설업 시중노임단가 적용 검토

붙임  세부 심사내역 1부.

[붙임]

세부 심사내역

■ 일위대가 및 단가산출 등 조정                                  (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 터파기 - 기계 80% + 인력 20% → 기계 90% + 인력 10% ※ 현장여건에 맞춰 기계, 인력 터파기 비율 조정	㎥	1	3,763	2,557	-1,206	건설품셈 3-3-1 8-2-3
○ 되메우고 다지기 - 기계 80% + 인력 20% → 기계 90% + 인력 10% ※ 현장여건에 맞춰 기계, 인력 터파기 비율 조정	㎥	1	6,119	5,206	-913	건설품셈 8-2-3 8-2-11
○ 파이프행가(앵커볼트) - 통신내선공 0.08인 → 내선전공 0.036인 ※ 시공 품이 저렴한 전기품셈 적용	개	1	25,782	12,601	-13,181	전기품셈 5-29
○ 관로구 방수 - 보통인부 0.328인 → 내선전공 0.196인 - 통신케이블공 0.232인 → 저압케이블전공 0.1인 ※ 적정 품 적용(삽입형 → 실링가스킷)	개	1	118,582	49,253	-69,329	전기품셈 2-18 4-47
○ 케이블 동시 포설 - 스피커, TV, 통신 케이블 ※ 스피커·TV 2열 90%, 통신 4열 85% 적용	m	1	내역서 참조			전기품셈 5-10 통신품셈 4-3-1
○ 매입 배관 변경 - HI 관 → PE 관 ※ 현장여건에 맞는 자재 선정	m	1	내역서 참조			통신품셈 2-1-3
○ 스피커 - 통신설비공 0.21인 → 0.189인 ※ 동시 설치로 본 품의 90% 적용	개	1	49,063	44,157	-4,906	통신품셈 7-11-5