<동두천 캠프보산 월드 푸드 스트리트 조성>

과 업 지 시 서

경기문화재단

동두천 캠프보산 월드 푸드 스트리트 조성

과 업 지 시 서

1		과업개요

○ 추진 배경

o 동두천 캠프보산(보산동 외국인관광특구) 월드 푸드 스트리트(음식문화거리) 기반시설 확충

o 경기문화재단-동두천시의 경기북부 문화거점 조성을 위한 문화기반 시설과 주민편의시설 확충

○ 추진 목적

o 동두천 보산동 외국인관광특구 음식문화거리 조성을 통한 지역활성화

o 동두천 캠프보산 월드 푸드 스트리트 음식매장별 기반시설 조성 공사

○ 주요내용

o 동두천 보산동 외국인관광특구 내 월드 푸드 스트리트 음식매장별 기반시설 제작 후 현장설치

2		과업현장

○ 사업 개요

o 사 업 명 : 동두천 캠프보산 월드 푸드 스트리트 음식매장 조성공사

o 사업기간 : 계약일로부터 ~ 50일

o 계약방법 : 나라장터 전자입찰

o 주    최 : 경기도, 동두천시

o 주    관 : (재)경기문화재단

○ 과업장소개요

o 장    소 : 동두천시 보산동 외국인관광특구 내 거리일원

<보산역 외국인관광특구>

<구조물, 플랜트 설치 적용구간>

3		과업설계서

○ 별첨자료 : 동두천 캠프보산 월드 푸드 스트리트 음식매장 설계도서

※ 용역수행 업체는 경기문화재단이 제공하는 실시설계도서를 참고하여 제작하며, 설계의 변경은 불허한다. 단, 제작과정상 필요하다고 인정하는 부분은 상호 협의하에 수정·보완 할 수 있다.

<외부조성도>	<내부조성도>

4		과업일반

○ 추진일정계획

기 간	구 분	내 용	비고
공고기간	입찰공고	입찰 공고	나라장터
계약일	업체선정	업체선정	발표심사
계약일+10일	세부계획수립	구조물, 플랜트 제작 계획수립 (인력, 장비, 현장점검, 안전대책 등)
계약일+20일	제작	구조물, 플랜트 제작	제조공장
계약일+40일	검수	구조물, 플랜트 검수	제조공장
계약일+50일	설치	구조물, 플랜트 현장설치	현장협의
	하자보수	과업별 하자보수	현장협의
계약일+60일	제출	결과보고서, 정산서 제출

※ 본 일정은 계획안이며, 사정에 따라 변경될 수 있음

○ 사전협의 사항

o 동두천시 캠프보산 월드 푸드 스트리트 음식매장별 제작방식과 일정

o 현장설치를 위한 사전협의 및 업무사항 공유

○ 결과보고

o 결과보고 시점 : 과업수행 이후 10일 이내

·제출내용 : 결과보고서 3부(제작 및 설치 사진대장, 유지관리 매뉴얼)

·동두천시, 경기문화재단 제출

○ 과업 범위 및 내용

구 분	내 용		비고
	형태	수량
월드 푸드 스트리트 음식매장	음식매장	13개동	실시설계도서 참조
	공용 취식장	2개동

※ 설치부수는 현장에 따라 변경될 수도 있음.

5		일반사항

1. 일반사항

1) 도급자는 설치과정에서 발주처 감독관의 지휘감독을 받아 본 용역을 성실히 수행 하여야 한다.

2) 도급자는 본 과업의 지시서와 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하여야 하며 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적인 책임을 진다.

3) 본 과업 수행과정에서 발생되는 점검내용의 미비, 과오, 기술상 오류 등의 결함에 대해 책임이 면제될 수 없으며, 본 계약 당사자 이외의 제3자에 의해 작성된 각종 도서가 용역성과의 붙임자료로 된 경우도 도급자의 책임 한계는 동일하다.

4) 본 과업지시서에 명기되지 않는 사항이라도 발주처의 과업 수행 상 필요하다고 인정되는 추가과업에 대하여는 도급자 책임 하에 성실히 수행하여야 한다.

5) 기획전시실 공사의 재료, 구조 및 공법 등의 상세를 나타낸 공작도를 작성하여 담당원의 승인을 받아 시공한다.

6) 전시실 공간 조성공사는 제시한 과업사항을 준수하고 공사시방에 따른다.

2. 세부지침

가. 공사 기간 중 제반 안전사고에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 지며, 발주자의 공유시설물의 손실 및 파손 시에는 즉각 해당사실을 숨김없이 알려야 하고 적법한 절차에 따라 배상 하여야 한다.

나. 도급자는 현장 대리인을 선임하여 감독자의 지시에 따라 제반 작업을 지휘 감독한다.

다. 외부시설 중 부득이 연출기법 변경 시 에는 사전에 감독관의 허가를 득하도록 한다.

라. 공사시작 전 손상가능부분에 보양을 철저히 하며 기존 시설물의 파손시 원상 복구한다.

마. 내부시설 세부 상세내역은 감독자의 지시에 의한다.

3. 사업비의 청구 및 지급

업체는 사업을 완료한 후 비용을 청구할 수 있으며, 경기문화재단은 검수 완료후 14일 이내 청구 받은 비용을 지급하여야 한다.

4. 지도-감독-A/S 등

가. 사업의 원활한 추진을 위하여 사업추진과 관련하여 발주처는 계약업체를 지도․감독하며 계약업체는 이에 따라야 한다.

나. 계약업체는 경기문화재단에서 지정하는 자가 관계서류열람, 현장 확인, 관련자료 제출 등을 요청하는 경우 이에 응해야 한다.

5. 비밀보장의 의무

경기문화재단과 계약업체는 이 협약의 이행에 따른 상담자의 정보에 대하여 비밀을 보장하여야 한다.

6. 계약의 해지

가. 경기문화재단은 아래와 같은 사유가 발생하면 이 계약을 중도에 해지 할 수 있다.

• 계약업체가 계약사항을 이행하지 아니하거나 위반한 경우

• 계약업체가 사업을 수행할 능력이 없다고 경기도미술관이 인정하는 경우

나. 경기문화재단은 나항의 1번 및 2번 사유로 인하여 협약의 해지 등을 하고자 하는 때에는 사전에 계약업체에게 의견진술의 기회를 주어야 한다.

다. 경기문화재단은 계약업체의 귀책사유로 인하여 계약이 해지되는 경우에는 사업지연에 대한 손해배상을 청구 할 수 있다

라. 계약업체의 귀책사유로 인하여 제3자로부터 손해배상 청구를 받은 경우에는 법원의 판결에 의하여 계약업체가 배상하여야 한다.

7. 권리 의무의 양도제한

계약업체는 본 약정에 관한 권리 및 의무의 일부 또는 전부를 제3자에게 양도하거나 제한물권을 설정할 수 없다.

8. 성과물 제출

가. 공사 전, 중, 후 사진

나. 제작결과물 관리메뉴얼

다. 시공에 따른 산출 가격 근거 자료

※ 성과물은 발주처와 협의하여 항목 또는 수량의 조정이 있을 수 있음

9. 기타

본 과업지시서 상에 규정되어 있지 않은 사항은 관계 법령 및 지침 등에 의하고 규정되지 않은 사항은 발주처와 계약업체가 상호 협의하여 처리하되, 상호 이견이 있는 경우 발주처의 결정에 따르며 이는 본 과업지시서 해석 상 이견 발생 시에도 적용한다.