(재) 경기문화재단 경기도미술관

경기도미술관 ‘민화와 K-POP 아트 전시’ 조성 공사

경기도미술관

‘민화와 K-POP 아트 전시’ 조성 공사

과업지시서 및 특기시방서

2024. 10.

공  사  개  요

1.  공 사 명 : 경기도미술관 ‘민화와 K-POP아트 전시’ 조성 공사

2. 대상지 : 경기도미술관 2층 대전시실 1~4, 소전시실 1~2

- 경기도 안산시 단원구 동산로 268 경기도미술관)

- 경기도미술관 2층 대전시실 약 484평(1,600㎡)

- 하단 도면의 대상 영역(초록선 내) 참고

3. 과업기간: 착공일로부터 2025년 2월 24일

※ 작품 해체 시 유리 해체 공정 포함_경기도미술관의 작품 해체 일정에 따라 변경될 수 있음.

※ 별첨 예상공정표 참조.

1) 착공일로부터 2024년 11월 3일까지 기존 구조물 철거 및 공간 조성 시공

2) 전시 작품 설치 후 2024년 11월 10일까지 유리 설치(밀폐조립) 시공

3) 전시 작품 해체 시 2025년 2월 24일 유리 철거 시공

4. 과업방향: 경기도미술관 ‘민화와 K-POP 아트 전시’ 조성 공사의 도면, 시방서, 내역서에 따라 작업

6. 전시조성공사의 특기

1) 가설 및 철거공사

(1) 작업장바닥 보양(비닐, 플라베니아, 합판)

(2) 바닥 콘센트 덮개 보양(합판)

(3) 작업통로바닥 보양

(4) 기존 전시실 구조물 철거, 벽면-바닥면 오염물 처리 및 잔손 보기  2) 전시시설조성

(1) 전시벽체 (목구조 벽체 설치, 방염)

(2) 전시좌대 (목구조 좌대 제작 설치, 방염)

(3) 작품 케이스 제작 설치 (강화유리 진열장 설치-이 설치는 작품이

비치된 이후 조립 마감 진행)

(4) 비상구 암막 커튼 설치 (미술관 보유)

(5) 기존벽 도장 (오염부분)

(6) 전시벽 도장

(7) 기존 복도측 전시실 입구벽 도장

3) 전시 종료 후 유리 진열장 해체

(1) 유리 진열장 해체 및 폐기

4) 건설폐기물

(1) 철거 폐기물처리

7. 착수계 및 완료계 제출

1) 착수보고 : 사업자는 계약체결 후 3일 이내에 본 과업에 착수하여야 하며

착수계 제출

2) 완료보고 : 공사 종료후 계약 종료일까지 최종 보고 수행

사업담당자에게 완료계와 결과보고서 메일로 제출

결과보고서에는 진행 과정 및 공사 전 후 비교 사진이 담겨

있어야 함.

과 업 지 시 서

□ 일반 시방서

본 전시조성은 경기도미술관 ‘민화와 K-POP아트 전시’ 전시시설 내부공간 조성으로서 일반 건축공사가 아닌 전시공간을 구성하는 조성이므로 내부 마감의 정밀성과 관람객 안전을 위한 구조적 안전성을 우선으로 시행한다.

- 참여하는 모든 근로자는 주 40시간 근로시간을 지켜야한다.

- 미술관 운영시간에는 자재 및 공구의 운반은 금지한다.

- STEEL각파이프 등 부재는 반드시 공장 제작 하여 현장에서 조립할 수 있는 상태로 반입하여야 한다. 부득이한 경우 해당 전시의 담당자의 승인을 받아 감독관 입회 하에 작업한다.

- 현장정리는 수장목공 부분에 한하며, 전시실 면적의 30% 적용한다.

- 기존벽의 도장은 균열 및 하자 부분 위주로 샌딩과 퍼티 작업 후 수성페인트 2회 도장을 적용하며, 신설벽에는 보드(MDF, 석고)접합부분을 채움하여 수성페인트 2회 도장을 적용한다.

1. 적용범위

1.1 이 시방서는 경기도미술관 전시공간 조성에 대하여 적용한다.

1.2 이 시방서에 명시되지 않은 사항은 다음에 준용한다.

1) 국토교통부 제정 건축공사 표준 시방서

2) 건축, 기계설비, 전기, 조경표준시방서

3) 건축법, 건설기술 관리법, 건설산업기본법 등 본 조성과 관련이 되는 법령상의 관련 규정

4) 산업표준화법, 근로기준법, 산업안전보건법, 환경보건관계법, 기타 건축공사 관계 법령

5) 기타 본 조성과 관련이 있는 사항으로 일반적으로 적용하는 기술적 상식이나 규정 및 기준

6) 계약 일반조건, 입찰유의서, 기타 관계 예규

2. 용어의 정의

2.1 이 시방서에서 ″발주자″라 함은 「경기도미술관」을 말한다.

2.2 이 시방서에서 ″수급자″라 함은 「경기도미술관 전시공간 조성 시공자」를 말한다.

3. 공정계획서, 안전관리 계획서 제출

3.1 수급자는 계약일로부터 2일 이내에 공정계획서와 안전관리 계획서(장비사용)를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

3.2 공정 계획은 전시장 조성 전체 공정 계획을 고려하여 작성하되 타 공정에 지장이 없도록 작성하여야 한다.

3.3 공정계획서는 다음과 같이 나누어 작성하여야 한다.

1) 전체 공정 계획서 (조성일정)

2) 시공도 작성 및 승인 신청 일정 계획

3) 자재 및 하수급 승인 신청 일정 계획

3.4. 안전․보건 관리 및 매뉴얼 수립

1) 전염병(코로나-19 등) 예방 조치(방역물품 비치 등) 및 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 따라 안전 교육 및 안전 조치 교육 등과 관련한 예산 확보{(재료비+직접노무비+관급자재)x2.93%} 등 안전 계획 및 조치 철저

2) 시공 기간 내 안전·보건 종합 매뉴얼 수립

4. 사용자재의 승인

4.1 수급자는 조성에 사용하는 모든 자재에 대해서 사용 전에 견본 등을 발주자에게 제출 승인을 얻어야 한다.

4.2 자재 사용 승인신청서을 하는 때에는 다음 사항을 첨부하여야 한다.

1) 자재견본

2) 제조회사에 대한 자료

3) 관련 규격이나 기준

4) 공법에 대한 자료

5) 기타 발주자가 요하는 자료

(STEEL 각파이프, 각재, 보양테이프, MDF, 방염MDF 합판(친환경E1), 석고보드, 도료, 플라베니아, 등)

5. 하수자의 승인

5.1 수급자가 조성의 일부를 제3자에게 하도급 하고자 하는 때에는 미리 발주자의 승인을 받아야 한다.

5.2 수급자가 하도급승인 신청을 하는 때에는 발주자가 내용을 검토하는데 필요하여 요구한 자료를 제출 하여야 한다.

6. 자재반입 및 검사

6.1 수급자는 자재를 현장에 반입하기 전에 자재 반입계획서를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

6.2 수급자는 자재를 현장에 반입하고자 하는 경우 사전에 발주자에게 통보하여야 한다.

6.3 현장에 반입된 자재 및 장비는 발주자의 승인 없이 임의로 반출시켜서는 안된다.

6.4 조성에 사용되는 모든 자재는 발주자의 검사를 받아야 한다.

6.5 수급자는 발주자가 자체 검사를 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공해야 하며, 각종 시험 및 검사에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

7. 시공검사

7.1 조성 중에는 공정별로 발주자의 중간 검사를 받아야 하고, 후속 작업은 선행작업의 중간 검사를 합격한 후에 시행하여야 한다

7.2 수급자는 발주자가 검사(준공검사, 기성검사, 하자검사 등 모든 검사를 포함 한다) 하는데 지장이 없도록 모든 편의를 제공하여야 하며, 검사에 소요되는 모든 비용은 수급자가 부담한다.

7.3 사후 검사가 곤란한 공정은 발주자가 지명한 감독관 입회하에서 시공 사진으로 대체한다.

8. 보고

8.1 수급자는 일일작업계획 및 실적 등을 발주자에게 보고하여야 한다.

8.2 조성 중 중요한 부위 및 매몰되는 부위에 대해서는 천연색으로 사진 촬영하여 사진에 설명을 기재한 사진보고서를 제출하여야 한다.

9. 현장 관리규정 등의 준수

9.1 수급자는 발주자가 현장 관리상 필요해 제정한 규정이나 요구되는 사항에 대하여 이를 준수하여야 한다.

9.2 수급자는 발주자가 전체 조성의 공정 관리상 필요하여 요청하는 경우에는 이에 따라 조성을 진행하여야 한다.

10. 안전관리

10.1 수급자는 현장 내 안전관리에 적극 협조하여야 하며, 조성 중 안전모, 안전화, 안전조끼를 착용하지 않았을 경우 현장에서 즉시 퇴출 조치하며 이에 이의를 제기할 수 없으며, 추후 지연 공정은 수급자의 책임으로 한다.

10.2 수급자는 현장 실정에 맞는 자체 안전관리 계획을 수립하여 시행하고 정기교육 등을 통하여 안전관리 규정준수에 만전을 기해야 한다.

10.3 수급자는 안전관리 소홀로 인하여 발생되는 사고나 재해에 대하여 민, 형사상의 모든 책임을 져야 한다.

10.4 수급자는 조성중 타 시설물(작품, 부착물, 마감재 등)에 손상을 주거나 인명피해, 교통방해 등이 발생하지 않도록 필요한 조치를 강구하여야 한다.

11. 현장대리인

11.1 수급자는 발주자가 본 조성에 적당하다고 인정하는 경험과 기술능력을 가진 자를 현장 대리인으로 신청하여 현장에 상주시켜야 한다.

11.2 현장 대리인은 조성 전반에 대하여 수급자의 책임과 의무를 대행할 수 있어야 한다.

12. 현장조직

12.1 수급자는 조성 착수전에 본 조성에 종사하는 인원의 조직표를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

12.2 현장 대리인이나 관련 종사자가 조성의 수행상 부적당하다고 발주자가 판단하여 교체를 요구한 때에는 즉시 교체하여야 한다.

12.3 조직표에는 성명, 직위, 주소, 비상연락처를 기입하여야 한다.

12.4 사업수행자는 본 사업을 책임 수행하는 관리자를 임명하여 발주처 담당자와 상시 협의를 통해 과업을 수행하여야 한다.

12.5 공사를 담당하는 총괄책임자 및 공종별 책임자는 제작ㆍ설치 전 과정을 전담하여 관리하여야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있다.

13. 책임시공

13.1 수급자는 본 시방서에 표기되지 않은 사항이 있을 경우에는 기술적 상식상의 품질이 확보될 수 있도록 시공하여야 한다.

13.2 수급자는 설계도서에 누락된 사항일지라도 조성의 성질상 당연히 시공하여야 할 경미한 사항은 발주자의 지시에 따라 시공하여야 한다.

14. 전시계획에 따른 수급자의 협조

14.1 수급자는 전시계획에 지장이 없도록 하여야 하며, 전시개막이 원활히 시행할 수 있도록 필요한 협조를 하여야 한다.

14.2 수급자는 조성기간 내 조성 완료 후에라도 준공일까지 현장에서 요구되는 보수작업을 하여야 한다.

15. 의의

도면과 시방서의 내용이 서로 다르거나 명기가 없을 때 관련조성과 부합되지 아니할 때 또는 의문이 생길 때에는 발주자 해석 및 지시에 따라야 한다.

16. 사용자재

16.1 조성에 사용되는 모든 자재는 K.S표시품이 없을 경우에는 최상급 신품을 사용하여야 한다.

16.2 자재 생산업체가 다수일 때에는 자체품질관리, 생산시설관리규모, 생산실적이 우수한 업체에서 생산되는 자재를 사용하여야 한다.

17. 발생물

수급자는 조성의 시행에 따라 생긴 발생물은 발주자의 지시에 의해서 정리하고, 발생물 조서를 첨부하여 지시한 장소로 운반, 인도 여야 한다.

18. 사고의 보고

수급자는 가설물이나 구조물의 파손 및 기타 조성 수행에 영향을 미치는 사고나 인명의 손상 또는 제3자의 피해를 미치는 사고가 일어났을 때 혹은 그로 인한 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 하고 발주자에게 즉시 보고하여야 한다.

19. 작업시간

수급자가 조성 내용상 불가피하여 야간 작업을 해야 할 경우, 미리 발주자에게 승인을 받아야 한다.

20. 주의사항

20.1 공사가 진행되는 과정에서 경기도미술관 시설의 훼손의 우려가 염려되는 부분은 작업 전, 담당 감독관에 보고한 후 감독관의 지시에 따라서 조성을 진행한다.

20.2 모든 공정에 대하여 반드시 발주처의 승인을 받은 후 제작 및 진행하여야 한다.

20.3 사업수행 중 또는 완료 후에라도 본 제안요청서 및 계약 문서에 규정된 요구 조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주 기관이 보완을 지시할 수 있으며 소요되는 모든 경비는 사업자가 부담하여 보완ㆍ수정하여야 한다.

20.4 본 사업수행과 관련된 자재 및 재료, 노무비 등 제반 소요비용은 사업자가 부담하여야 한다.

20.5 사업 진행 중 필요한 각종 심의, 허가, 협의사항 등에 수반되는 설계 및 자료는 발주처가 필요로 할 시 적기에 제공하고 이에 수반되는 비용은 사업수행자가 부담하도록 한다.

20.6 사업수행자는 사업을 수행함에 있어 관련 법규 및 법령을 성실히 이행하고 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 발생하는 모든 피해 상황에 대하여 책임을 진다.

20.7 하자보증·무상보수 기간은 전시 종료 및 유리 해체 시(2025년 2월24일, 경기도미술관 전시 현장 상황에 따라 사전 협의 후 해체 일정 변경될 수 있음) 까지로 하며 해당기간 중 발생하는 장애, 오류, 하자 등 발주처의 요구 시 언제라도 무상으로 하자보수 및 기술지원을 실시한다.

21. 보안 및 개인정보보호 지침

21.1 사업수행자는 과업수행기간 중 모든 용역 사항에 대한 보안 및 개인 정보에 대한 책임이 있으며, 관련 규정을 준수하여야 한다.

21.2 사업수행자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제 3자에게 누설해서는 안 되며 발주처가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

21.3 설계 도면은 발주기관의 허락없이 사업수행자가 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

21.4 사업수행 과정에서 취득한 일체의 정보 및 개인정보를 유출/누설하지 않도록 하여야 하며, 습득한 개인정보처리는 ｢개인정보보호법｣ 제25호 제1항에 의거 ｢개인정보처리위탁 계약서｣를 작성하고, 과업 수행자는 계약서의 내용에 따라 개인정보처리 및 과업종료 후 ｢개인정보처리 위탁 결과보고서｣를 제출하여야 한다.

21.5 ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제75조 및 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제91조 1항에 해당할 경우 계약을 해지할 수 있다.

21.6 본 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 관련 법률에 따르며 본 지침의 해석상 이견이 있을 시 협의에 따라야 한다.

특 기 시 방 서

□ 특기 시방서

1. 일반사항

본 조성에 사용되는 자재는 STEEL각파이프, 합판(E1), 석고보드, MDF, 방염MDF, 각재, 보양자재 등이므로 규격제품은 완제품으로 반입한다.

현장에서 가공, 제작되는 자재는 지정된 작업장에서 가공, 제작 후 전시실에 조립되어야한다.

강재(STEEL각파이프)의 절단작업은 지정된 작업장에서 가공, 제작하여 반제품으로 반입 후 조립되어야 한다.

바닥 보양 테이프는 끈적임이나 흔적이 없도록 잔여물은 신너등을 이용하여 깨끗이 제거해야한다.

1.1 안전 사항

(1) 자재 운반 및 시공에 따른 안전사항

(1) 자재운반시 비산먼지 등의 발생이 없도록 조치한다.

(2) 당일조성으로 인한 폐기물 및 비산먼지 등은 내부공간에 적재 금지한다.

1.2 조성관리

1) 설계도서 사전검토

(1) 착공전 시공계획서에는 추후 결함 등이 발생될 소지가 있는 부분이나 시공법에 대해 도면을 정밀검토한 후 세부시공도면을 작성하여 감독관의 승인 후 시공에 임한다.

2) 자재관리

(1) 모든 자재는 조성전 감독관의 샘플 및 카다록 등으로 검수 후 시공하도록 한다.

(2) 본 조성에 사용되는 모든 자재, 제품은 KS제품등 인증된 것을 원칙으로 한다.

3) 조성관리

(1) 조성전 기존시설 및 설치물의 파손 및 훼손 방지를 위하여 보양 작업후 조성을 진행하며 미설치로 인하여 발생한 문제는 도급자가 원상 복구하여야 한다.

(2) 수급자는 조성의 건축인가에 필요한 서류와 도면등을 적극적으로 대처한 후 조성에 임한다.

2. 전시조성

2.1 일반사항

1) 내, 외장 재료는 미리 견본품을 제출하여 재질, 형상, 치수, 색깔 및 마무리 등에 대하여 감독관에게 승인을 받는다. 한국공업규격에 있는 것은 이에 적합한 것으로 하고, 준불연재료, 난연재료 등을 사용하는 경우에는 국토교통부장관이 인정한 것으로 한다

2) 벽, 천정의 못박기는 판면에 처짐이나 우그러짐 등이 생기지 않도록 한다.

3) 시공 시 현장에 먼지가 많이 발생하여 공조에 문제가 생길 수 있으므로 먼지를 제거 가능한 환경 조성 후 시공하여야 한다.

2.2 가설

1) 작업장 내에는 바닥은 “비닐, 합판 및 플라베니아”로 보양하여 기존 시설물이 훼손되지 않도록 해야한다. (친환경E1등급이상의 보드-합판,MDF- 사용)

※대전시실 1 진입로 도장 시에 반드시 주변의 작품(복도 벽화)을 5T 이상의 발포지 2겹 이상의 3T 플라베니아로 완벽 보양한 후 작업을 실시한다.

2) 보양재와 보양재의 고정은 일반테이프로 접착고정하고, 보양재와 기존바닥면의 고정은 커트에이스로 접착고정한다.

3) 자재의 반, 출입통로에는 “천막지” 보양하여 기존 시설물이 훼손되지 않도록 해야한다.

4) 고소작업대의 작업공간 및 이동통로에는 “플라베니아 혹은 합판”으로 보양한다.

2.3. 내부 비계

1) 전시실의 천정고가 높고 설치되는 전시벽체, 전시 관련시설(암막천정 및 천정틀) 의 높이 가 높으므로 작업용 가설비계는 안전을 최우선으로 고려하여 작업안전 시설(안전난간, 고정핀, 흔들림방지시설, 전도방지시설, 등) 은 철저히 설치해야 하며, 수시로 점검하여야 한다.

2) 내부작업용 비계의 구비사항은 다음과 같다.

① 작업장소와 근접해서 작업하기 쉬운 높이와 넓이의 작업바닥을 갖출 것.

② 작업자의 추락방지, 재료와 도구의 낙하방지, 안전성의 결함 여부 확인

③ 강도, 작업충격에 의한 안정성

④ 작업원의 이동, 통행이 용이할 것

2.4 비계 및 발판

1) 틀 비계 사용할 때 파이프의 강도는 강도계산을 하여 안전하게 하며,최하 외경 42,7㎜, 두께 2.4㎜ 이상의 부재로 제작된 것으로 한다.

2) 재료 및 부속철물은 KSF 8002(강관비계), KSF 8003(강관 틀 비계)에 합격한 것을 사용한다. 이 규정 이외의 것을 사용할 때에는 감독원의 승인을 받는다.

3) 비계기둥, 띠장, 비계장선, 가새, 구조체 연결 및 부축기둥, 밑받침, 부속철물등은 국토교통부 표준시방서에 따른다.

4) 다음 사항은 감독원의 지시에 따른다.

① 작업원의 출입구 및 통로 계획

② 작업장내의 재료 운반 방법 및 구획과 분리방법

③ 자재 적치장의 위치 및 면적

2.5 전시벽

1) 시공조건 확인

① 현장이 설치를 위한 준비가 되어 있는지 확인하고, 시공오차 및 성능에 영향을 미치는 기타조건에 대한 적합여부를 확인하고 검측을 하여야 한다.

2) 시공기준

① 전시벽은 특기가 없는한 바닥에서 설계도면의 높이까지 설치하여야 한다.

② 전시벽이 바닥의 변위를 수용하기 위하여 바닥 마감재 및 천정 마감면과 접하는 부분에는 완충부를 반드시 설치하여야 한다.

③ 전시벽은 설치 후부터 철거시 까지 기존건축물 부분에 잔사(흠집, 스크레치, 끈적임,등)이 남지않도록 감독관지정 보양재 및 보양테이프를 사용하여 시공되어야한다.

3) 시공

① 전시벽

1. 전시벽은 MDF 판재를 정확하게 재단하여 바닥에 미리 배치하고 설치된 바닥판재를 기준으로 각재 구조를 제작/설치 한다.

2. 각재 구조 위에 MDF를 먼저 부착하고 그 위에 준불연재인 석고보드를 부착하여 2겹 시공한다.

3. 전시벽 상단에는 여름철 냉방기 동작으로 인한 결로 낙하를 방지하기 위해 전시벽의 폭보다 넓은 구조를 설치한다. 상세한 사항은 시공 상세도면과 감독원의 지시에 따른다.

4. 모서리부분, 개구부주위, 설비물 부착 위치등에는 세부시공 상세도와 감독원의 지시에따라 보강 각재를 추가 설치하여야 하며 유리 진열장이 들어가는 부분은 강화유리의 무게를 감안하여 충분히 구조적으로 보완하여 시공한다.

② 유의사항

1. 전시벽면의 구조틀 시공에서 수직재 간격을 600㎜ 이하로 하여야 하며 작품 중량이 있는 부분은 감독관의 지시에 따라 추가 보강작업을 하여야 한다.

2. 전시벽면의 시공은 이 내역서에 명기되어있는 규격 및 재질과 동일한 제품으로 시공하여야 하며 간이 전시벽면의 경우 중량물의 작품을 지탱할 수 있는 벽면으로 조성하여야 한다.

※ 작품의 중량에 따라 추후 작품 보강대 작업을 하여야 한다.

3. 전시장 바닥 및 천정 부위에 손상이 가지 않아야 하며,  특히 이동패널 주변부 설치, 철거 시 파손에 주의하며, 훼손 시 도급자가 원상 복구하여야 한다. 감독관이 전시벽면의 보강지시 시 도급자는 이를 행하여야 한다.

4. 목재 칸막이 전시벽면 설치 시 수직, 수평 등을 계측 한 후 시공하여야 한다.

5. 전시벽면 틀을 설치 완료 후 에는 감독관의 확인을 득한 후 다음 공정을 실시하여야 한다.

6. 바닥 및 천정, 기존벽과의 연결 부위는 공간이 발생하지 않아야 하며 옆 전시공간의 빛이 들어오지 않도록 차단하여야 한다.

7. 석고보드(T:9.5㎜), MDF(9T), 합판(T:8.5㎜)로 설치하고 칸막이틀과의 이격이 발생되지 않아야 하며, 감독관의 확인을 거친 후 시공하여야 한다.

8. 벽체의 설치시 전도나 밀림현상이 발생하지 않도록 시공하여야하며 해당 상황이 예견될 때 감독원에게 보고하고 그의 지시를 받아 구조를 보완한다.

9. 이음매 처리

1) 마감판 석고보드의 이음 조인트 부위와 나사못 머리부문은 석고보드 전용 조인트 테이프(한냉사) 와 콤파운드(초회:아크릴퍼티, 재회:일반퍼티)를 사용하여 밀실 평활하게 처리하여 충분히 건조시킨 다음, 연마지로 표면을 매끈하게 샌딩처리 한다.

2) 이음매 부분의 단차가 심하거나 평활도가 불량한 부분과 페인트류 및 스프레이 코트 마감 등 도장을 요하는 석고보드의 표면은 석고보드 전용 퍼티를 사용하며, 전면퍼티 및 샌딩처리를 2-3회 실시하여 평활하게 처리한 다음, 감독원의 검사승인을 득한 후 후속공정에 착수한다.

3) 표면의 흠집이나 손상은 석고보드 표면은 깨끗하게, 전체적으로 연속된 표면을 유지하며 명기된 마감을 하기위하여 보수해야 한다.

2.6 유리진열장

① 1. 진열장은 유물을 안전하게 보존하도록 제작한다. (전시 작품 설치 후 조립 마감 / 전시 종료 후 전시 작품 해체 시 유리 철거)

2. 유리의 무게를 고려하여 유리 설치 벽면의 좌우상하에 충분한 구조를 확보한다.

3. 유리는 접합유리 등을 사용하여 파손되더라도 유물 및 관람객의 피해가 최소가 되도록 한다.

4. 유지보수 시 유물공간을 개방하지 않고 점검이 이루어지도록 제작한다.

5. 도난방지를 위한 방범필름 등의 시공을 고려한다.

7. 전기 사용기계, 기구는 유물이 설치되는 공간과 분리되어 별도 공간에 잠금장치를 두어 제작한다.

8. 1차전원 공급간선의 용량(부하)에 준하여 제작한다

9. 조명기구와 기계ㆍ기구는 별도회로로 구성한다(조작전원, 동력, 조명용).

10. 전선 및 배관은 전기설비기술기준에 준하여 설치한다.

11. 배선 및 배관은 움직이지 않도록 진열장 내부에 고정한다.

12. 전기기계ㆍ기구와 외함 간 절연 및 외함접지(제3종접지)를 반드시 한다.

13. 조명등기구의 재질(아크릴)은 변색이 없어야 한다.

14. 전자조도조절장치가 설치되는 경우 설정 조도값이 초기화되지 않아야 한다.

15. 형광구 베이스는 틈새로 인한 접촉 불량, 탈락이 없도록 시설한다.

16. 인공광원장치는 고조파 발생이 20% 이하인 안정기를 시설한다.

2.7 도장

“도장은 전시작품의 설치 후 부분도장(잔손보기)을 실시하여야한다.”

① 작품반입 설치 후 잔손보기도장

1) 석고보드면 도장은 시공과정에서 오염된 유해한 부착물(먼지, 흙, 기름 등)은 완전히 제거한다.

2) 면의결점(흠, 구멍, 갈램, 변형, 등)을 보수하여 면을 소요의 상태로 정비한다. 기존 부착물 철거부분의 흠집, 구멍 등은 보수후 전면퍼티 작업을 하여 평활한 면을 만들어야 한다

3) 배어나오기(浸出) 또는 녹아나오기 등에 의한 유해물(수분, 기름, 수지, 산, 알칼리 등)의 작용을 방지하는 조치를 한다

4) 바탕면이 건조하지 않을 때에는, 그 다음 공정으로 옮겨서는 안된다

5) 도장 시 색상은 기본 바탕색에 가장 가까운 감독관이 지정한 미술관 C.I.P 색상으로 하여야 한다.

6) 감독관이 지정한 장소의 전시벽면은 전시여건에 따라 기본바탕색 샘플에 의해 도장작업을 하여야 한다.

7) 도장 작업 중 연마지 사용 시 바탕 부분을 상하지 않도록 연마하여야 한다.

8) 수성 도장은 기본 횟수 2회로 반드시 처리하여야 하며, 신규 설치된 칸막이는 석고보드접합부 채움후 2회 도장으로 하여야 한다.

9) 외기 온도 5°이상 습도 80% 이하에서는 도장 작업을 중단하여야 하며 칠의 덩어리 없이 잘 풀어서 기포, 이색이 생기지 않도록 도장하여야 한다.

10) 전시실 출입문, 하단부 걸레받이의 부분은 에나멜 페인트로 마감하고, 감독관이 지정한 색상으로 하여야 한다.

11) 도장작업 시 바닥․ 천정․ 시설물 부분은 보양재를 설치 후 작업을 하여야 하고 미 설치로 인하여 훼손된 부분은 도급자가 원상복구 하여야 한다.

12) 도장작업 시 대풍기등의 기계를 이용하여 전시실 내부의 강제배기를 하여야 한다.

2.8 기타

① 1. 전시실 조성에 이루어지는 모든 조성에 소요되는 자재 및 설치물은 조성 종료 후 현장정리를 통하여 비계 등을 철거한다.

2. 전시실 조성을 원할히 시행할 수 있도록 기타잡비는(총재료비의 3%이내) 도급자가 부담하여야한다.

3. 피난구 유도등은 소방기술기준에 관한 규칙 제104조에 적합하게 설치하여야 한다..

4. 배선은 전기설비 기술기준, 내선규정 등에 관한 규칙 등을 준수하여 설계도 및 시방서에 의거 사용하여야 한다.

5. 기획 전시의 특성상 일부 도면과 현장설치 여건이 상이한 부분은 도급자가 감독관에게 보고하여 시행하여야 한다.

6. 시공으로 인한 폐기물 및 정리, 청소는 수시 실시하여야 하고 항상 청결이 유지될 수 있도록 하여야 한다.

7. 전시실 조성으로 인한 폐기물은 도급자가 일괄처리 하여야 한다.

3. 철거

3.1. 철거 범위

1) 전시벽체 철거 : 기존 구조물 철거 후 조성공사 / 전시 종료 후 유리 진열장 해체와 유리 폐기

※  1) 착공일로부터 2024년 11월 3일까지 기존 구조물 철거 및 공간 조성 시공

2) 전시 작품 설치 후 2024년 11월 10일까지 유리 설치(밀폐조립) 시공

3) 전시 작품 해체 시 2025년 2월 24일 유리 철거 시공

3.2. 철거 및 폐기물

1) 철거는 철거 폐기물 성상별로 분류하여 정리, 밴딩한 후 감독관이 지정한 시간에 반출 하여야 한다.

2) 전시벽 및 목재구조물 철거시 기존 건축물이 손상되지 않도록 계획 하여 철거 하여야한다.

3) 철거시 손상된 부분 발생시 수급자의 부담으로 원상복구 하여야 한다.

4) 유리 진열장의 유리를 해체할 때 내부에 유물이 존재하는 상태이므로 유물이 훼손되지 않도록 유의하여야 한다.