- 엘리베이터 과업지시서 -

2020년 10월

Ⅰ. 과업개요

1. 과 업 명

인계동사무소 전기식 엘리베이터 보수공사

2. 과업소재지

경기도 수원시 팔달구 인계로 178

3. 과업 목적

「승강기 안전관리법」전부 개정에 따라 기존 인승용 승강기 2대에

대하여 승강기부품과 장치를 교체 및 추가하기 위함.

4. 과업주요 내용

가. 과업 수행은 담당자(감독관)와 협의 후 진행한다.

나. 세부 과업 내역은 아래와 같다.

구분	과업내역	비고
전기식 엘리베이터	- 승강장문 어린이 손 끼임 방지수단 - 승강장문 조립체(이탈방지장치) - 승강장문 비상가이드 - 카 문 어린이 손 끼임 장지수단 - 카의 상승과속방지수단 - 개문출발방지수단 - 브레이크 시스템 - 자동구출운전수단 완료후 수시검사	▸ 인승용 승강기 2대

다. 장비 현황

- 제조사 : SAM YANG ELEVATOR MOTOR

- 형  식 : 권상식(SYEL-1904)

- 종  류 : 승객용

- 전  원 : 380V, 4P

- 속  도 : 60min

5. 과업 기간

가. 본 과업의 기간 : 계약체결(착공)일로부터 28일간(4주)으로 한다.

나. 상기 과업기간은 절대공기이며 토·일요일을 포함한다.

(단, 절대공기를 위한 토·일요일 작업은 수급자의 판단에 의하며,

작업으로 인한 추가비용은 수급자 부담 원칙으로 한다)

Ⅱ. 일반사항

1. 상호관계

발주처는「경기문화재단」, 수급자는「계약상대자」로 지칭한다.

2. 용어의 정의

가.“감독관”이라 함은 본 공사의 수행을 지휘감독하며, 공사의 전반적인사항에 대하여 확인하는 발주처의 직원 또는 지정 대리인을 말하며,

아래와 같이 세분화 한다.

1) 감독관(정) : 공사감독관

2) 감독관(부) : 시설소장

나. “현장대리인”이라 함은 수급자가 지정하며, 감독관과 직접적인

업무협의가 가능하고 업무지시에 이행 가능하며, 본 과업과 관련한

서류제출과 전체공사기간 동안 상주를 하며, 공사의 전반적인 사항에

대하여 책임을 진다.

3. 관련서류

수급자는 공사 착공 전 감독관(또는 시설소장)이 요구하는 제반서류를

제출하여 승인을 받는다.

Ⅲ. 과업수행지침

1. 일반사항

가. 수급자는 공사과정에서 발주처의 업무협조를 통해 본 공사를 성실히

수행하여야 하며, 원칙적으로 하도급은 제한한다.

나. 수급자는 본 과업지시서와 내역서, 도면의 내용에 충실하며, 관련한

법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 성실하게 이행하고 안전에 유

의하여야하며, 수행한 과업의 질과 정확도 및 작업결과에 대한 전적

인 책임을 진다.

다. 본 과업의 수행과정은 문서처리를 원칙으로 하고 관계자료 및 산출

근거 등을 천연색 사진으로 작업 전, 중, 후를 제출하여야 한다.

라. 반입 자재의 검사결과 불합격된 자재는 즉시 반출하여야 하며, 감독

원의 검사 및 확인을 득하지 않고 사용한 자재에 대하여는 감독원의

지시에 따라 철거, 재시공하여야 한다.

마. 공사 중 음주, 흡연 등 안전 및 풍기문란 행위가 발생 시 감독관은

즉시 공사 중지를 명할 수 있으며, 현장대리인은 원인 파악 후 재발

방지책을 문서로 제출하여야 하며, 이로 인한 공사기간의 연장으로

인해 발생하는 지체보상금은 전적으로 수급자의 부담으로 한다.

바. 집기류 등 주문제작‧설치는 발주처 감독관의 검수확인 후 시공하여

야 한다.

사. 승강기안전관리법, 건축, 기계설비 및 전기관련법규, 교통약자의 이

동편의 증진법 또는 산업안전보건법, 소방법 등에 의한 형식・승인

제품으로서 최상급 원자재를 사용하여야 한다.

아. 본 사양서에 명시되지 않은 사항은 공사계약 일반조건 및 공사계약

특수조건 등 계약조건에 따른다.

2. 세부지침

가. 수급자는 현장 대리인을 선임하여 감독관의 지시에 따라 본 과업을

수행한다.

나. 반입된 자재는 내역서에 준하여 입고되도록 하며, 부득이 변경 시는

사전에 감독관의 허가를 득하고 이를 어길 경우에는 계약을 취소하

고 타 업체가 시공하여도 민, 형사상의 이의를 제기할 수 없다.

다. 공사시작 전 손상가능한 부분에는 보양을 철저히 하여 공사로 인한

피해가 없도록 조치하며, 본 공사로 인한 또는 부주의로 발생한 기

존 시설물의 파손은 수급자 부담으로 반드시 원상 복구한다.

라. 해체가 불가피한 부분에 대해서는 사전에 사진촬영 등을 하여 공사

완료 후 원상복구가 되도록 한다.

마. 전체적인 조율은 공정회의를 통하여 조정하며, 전체의 공정에 차질

이 없도록 감독관의 업무지시에 따라 공정을 관리 하여야 한다.

바. 작업과 관련한 소음, 분진 등의 공사와 직접적인 현장은 밀폐조치를

하고 출입문을 설치하며, 간접적인 현장은 감독관과 협의하여 적절

한 조치를 하여야 한다.

사. 수급자는 발주처와 계약 후 3일이내 공정표를 제출하여 승인을 받

고, 작업일보를 공사종료까지 매일 감독관에게 제출하여야 한다.

아. 상기 공사와 관련하여 안전사고 발생 시 대비 원할한 보상금 지급을

위하여 계약기간동안“근로자 재해보험”을 가입(공사명 반드시 입

력)하여 가입증명원 원본을 제출하여 한다.

자. 수급자는 승강기검사기준을 준수하여야 한다.

3. 안전관리

가. 수급자는 현장 내 제반재해방지를 위한 자체안전교육을 실시하여야

하고, 안전관리책임자를 지정하여 사고방지에 철저를 기하여야 하며

발생한 안전사고에 대한 모든 책임은 수급자가 진다.

나. 화재예방교육을 실시하고 화재의 위험성이 있는 제품은 허가 없이

반입 및 사용을 금한다.

다. 수급자는 노동법등 기타 관계법령에 따라 관리를 행하며 다음 사항

을 준수한다.

1) 노무자 기타 출입감시, 풍기 및 위생단속

2) 화재, 도난, 소음방지, 위험물 및 그 위치의 표시, 기타 사고방지

에 대한 단속

3) 시공자재 및 기기의 정비와 관리, 공사장의 청소

4) 교체공사 작업장 근처 안전휀스 설치 및 안내문구 부착 철저

5) 공사장 주변의 보안조치, 현장인원의 안전장비, 재해예방시설 및

유사시 대책마련

6) 수급자는 공사 중 발생된 안전 및 재해사고에 대하여 모든 책임을

지며 당사에 손해를 입혔을 경우에는 즉시 변상하여야 한다.

7) 공사 중 비상시에 대비하여 응급치료를 할 수 있을 정도의 약품 및

의료 시설을 준비하여야 한다.

라. 수급자는 시공도중 발생하기 쉬운 안전사고에 유의하여야 하며 안전

관리 수칙의 제반 이행사항을 충실히 지키도록 종사원에게 반복 교육

을 실시하고, 위험도가 높은 작업을 할 경우에는 감독원, 안전관리원

등과 충분한 협의를 하여 안전 대책을 강구한 후 작업하여야 한다.

4. 사용 자재 및 검사

가. 본 공사에 소요되는 자재는 KS 표시품 또는 승강기안전관리법의 인증

품의 사용을 원칙으로 한다. (단, KS 표시품이 없는 경우에는 자체

시험성적서를 제출하여 감독원의 승인하에 사용하여야 한다.)

나. 필요시 감독원은 수급자가 반입한 재료(자체 시험성적서 등)에 대하

여 이상이 있다고 판단될 경우 공인기관에 검사 및 시험을 의뢰 할

수 있으며, 이에 소요되는 비용은 수급자가 부담하여야 한다.

다. 수급자가 구입하여 사용하는 자재는 신품으로써 기계 및 재료는 사용

전에 감독원의 검사를 득한 후 사용하여야 한다.

라. 주요자재 및 기기제작의 품질을 위하여 중간검사를 실시할수 있으며,

검사에 필요한 비용은 수급자 부담으로 한다.

5. 공사 기간의 연기 및 중지

공사 시행중 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 공사를 중지 또는 연기

할 수 있다.

가. 관급자재의 공급 지연으로 인하여 공사가 지연될 경우

나. 설계 변경으로 인하여 공사 기간이 연장을 요할 경우

다. 관련 공정의 공사 지연으로 시공이 불가할 경우

라. 기타 공사 사정으로 공사가 지연될 경우

6. 시운전

가. 수급자는 설치 완료 후 감독원 입회하에 1시간 이상의 시운전을 실시

하여야 하며, 시운전 중 미비 사항은 계약자 책임 하에 즉시 보완하

여 감독원의 확인을 받아야 한다.

나. 승강기 안전관리법 강화에 따른 승강기 개량과 관련한 모든 장애에

대하여는 수급자의 책임으로 전량 무상수리 및 교체를 하여야 한다.

7. 기성 및 준공

가. 공사 기성(준공)은 본 과업지시서에 정한 모든 과업을 완료하고 필요

한 시험 및 현장정리가 완료되었다고 감독원이 인정하였을 때 기성

(준공)된 것으로 본다.

나. 수급자는 준공 기일 내에 다음 서류를 공사에 제출하여야 한다.

1) 제작 및 설치공정(호기별) 사진대장 : 2부

2) 교체부품 인증서(승강기 부품안전인증 등) 및 검사성적서 : 2부

3) 주요부품 목록(규격/사양 명시) : 2부.

Ⅳ. 하자보증 및 검사

1. 하자보증기간

본 공사의 하자보증기간은 교체한 부품에 한하여 3년으로 한다.

2. 검사(하자보증점검)

가. 본 공사의 준공완료 후 존속기간(보증기간) 중 연2회 이상 정기

적으로 보증점검을 하고, 그 결과를 문서로 제출하여야 한다.

⇒ 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제69

조「하자검사」

나. 공사 완료 후라도 공사와 관련한 업무 및 관련 자료의 제출 등

미처리사항에 대하여는 그 내용이 완료될 때 까지 별도 수행 한다.