과 업 지 시 서

사 업 명	전곡선사박물관 실감콘텐츠 제작 및 복합 체험공간 조성 용역

2021. 02.

사 업 명	전곡선사박물관 실감콘텐츠 제작 및 복합 체험공간 조성 용역
주 관 기 관	(재)경기문화재단
사업 담당자	심 경 보	031-830-5614
계약 담당자	서 은 경	031-288-5324

Ⅰ. 과업개요

1		과업목적

가. 박물관 고유의 콘텐츠와 실감콘텐츠기술의 결합을 통해 온라인 및 디지털 미디어 환경에 적합한 새로운 전시·교육 콘텐츠 제작

나. 선사문화를 직관적으로 경험하고 이해할 수 있으며, 성인에서 어린이까지 함께 체험할 수 있는 실감콘텐츠 제작

다. 기존 전시물과 신규 실감콘텐츠를 비롯하여 향후 다양한 전시·교육활동에 활용할 수 있는 체험공간 구성

2		과업개요

가. 사 업 명 : 전곡선사박물관 실감콘텐츠 제작 및 복합 체험공간 조성

나. 사업기간 : 계약체결일로부터 21년 6월 16일(수)까지

다. 사업대상 : 전곡선사박물관(경기도 연천군 평화로 443번길 2

라. 입찰방식 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

마. 사업범위 : 본체험 실감콘텐츠 (고화질영상·인터렉티브 미디어) 1건,

보조전시 실감콘텐츠 1건, 복합체험공간 조성 및 네트워크·전시기반 구축 일체

3		과업기본구성

가. 개방형 복합체험공간으로, 기존 전시물과 어우러져 전시효과를 높이며, 개별 관람객이 실감콘텐츠를 체험하고, 그 경험을 다수의 관람객과 함께 공유할 수 있도록 구성

나. 세계 선사문화를 대표하는 콘텐츠인 ‘외찌’를 주제로 선사시대 환경과 문화를 직접 체험할 수 있는 인터렉티브 미디어 제작

다. 박물관에서 제공하는 이미지와 영상, 텍스트 등 복합적인 정보를 대형화면을 통해 관람객에게 전달할 수 있는 미디어 환경 조성

라. 박물관 자체적으로 지속적으로 미디어 정보를 갱신할 수 있으며, 향후 지속적인 데이터베이스 업데이트를 진행하여 실감콘텐츠를 발전시킬 수 있는 CMS(Content Management System) 구성

Ⅱ. 과업내용

1		대상현황

가. 대상위치

1) 활용공간 : 전곡선사박물관 내 Interscope (예정)

2) 공간규모 : Interscope 내 현 VR체험기(2개동)와 외찌 전시대 부분

- 〈현 VR체험기〉(도면 내 1) 부분

: 넓이 약 0.18㎡(개방된 공간으로 약 6,000×3,000㎜)

- 〈현 외찌 전시대〉(도면 내 2) 부분

: 넓이 약 0.20㎡(타원형 구조물로 약 5,600×3,900㎜)

- 모두 개방된 공간으로 디자인 및 설계 전 실측이 수반되어야 함

3) 주안점

- 〈현 VR체험기〉(도면 내 1)는 기존 시설을 해체하여, 향후 지정될 위치에 내·외부 구조물을 개선하여 설치함

※ 재설치수량 및 개선내용은 발주처와 협의에 따라 진행해야 함

- 〈현 외찌 전시대〉(도면 내 2)는 기존 전시대의 디자인과 전시유물(외찌 미라 및 복원품)의 구성을 최대한 유지해야 함

4) 공간도면

대상 위치 도면

1- 현 VR 체험기 부분		2- 현 외찌 전시대 부분

2		과업세부내용

가. 기본방향

1) 콘텐츠 주제에 대한 깊은 이해를 바탕으로 전 연령대가 즐겁게 참여할 수 있는 실감콘텐츠 개발

2) 일회성 감상 및 체험으로 모든 콘텐츠를 소비하는 형식이 아닌 체험자의 의도에 따라 주제에 따른 다양한 결과를 제공할 수 있는 콘텐츠 개발

3) 전시물에 대해 밀접하게 전시정보를 제공하여 직관적인 관람경험을 제공할 수 있는 콘텐츠 개발

4) 향후 박물관 자체적인 데이터 관리를 통해 실감콘텐츠의 양과 질을 지속적으로 확대할 수 있는 관리 시스템 구축

5) 콘텐츠 체험자 외 동반인과 주변인들과 체험자의 경험을 공유할 수 있는 콘텐츠 구성

6) 전염병 및 위생관리 등을 위한 세척과 소독이 가능한 공간 구성

7) 실감콘텐츠 외에도 다양한 영상콘텐츠를 구현할 수 있도록 사업대상 공간을 최대한 활용하는 대형화면을 구비하고, 다양한 현장 교육활동을 진행할 수 있는 공간을 포함한 체험공간 구성

8) 내·외부 보안성을 강화한 실감콘텐츠 전용 로컬네트워크를 구성하여 안정적인 실감콘텐츠 운영·관리 시스템 구성

나. 세부주제 및 구성(안)

1) 실감콘텐츠 중심 주제

○ ‘ICEMAN 외찌’와 선사시대 환경과 문화

- 1991년 9월 19일 이탈리아-오스트리아 국경 사이 알프스 산맥의 외찌 계곡에서 발견된 약 5300년전 중년남성의 냉동 미라임

- 외찌로 명명된 미라는 뛰어난 보존 상태와 가죽옷, 나무활 등 썩기 쉬운 유물까지 5천 년 전 상태로 남아 있어 선사시대 문화 연구의 가장 중요한 유물이 됨

- 전곡선사박물관은 개관(2011년) 당시부터 외찌의 인류학적 중요성을 인식하고 정밀 복제 유물을 통해 소개하고 있음

2) 실감콘텐츠 구성(안)

구분	대상 콘텐츠 명칭	적용 실감기술(예)
본체험	ICEMAN 외찌와의 대화(안)	인터렉티브 미디어 고화질 영상
보조전시	얼음 속 외찌를 깨우다(안)	혼합현실(MR) 미디어아트

※제시된 전시제목과 구성 및 적용실감기술은 가안으로 제안에 따라 변동될 수 있음

○ 본체험 구성 (대화형 인터렉티브 미디어 중심)

1. 선사시대 환경과 삶을 대표하는 외찌를 주제로 한 UHD급 영상제작

- 복합체험공간에 구성될 DID시스템에서 운영

- 대화형 인터렉티브 미디어와 주제 및 시스템이 유기적 연결

2. 대화형 인터렉티브 미디어 콘텐츠 제작

- 고고학·인류학·고생물학 등 선사시대에 대한 전문적인 시나리오 데이터베이스(DB)에 기반한 대화형 응답시스템 구축

- 콘텐츠 운영을 위한 이동가능한 개별 기기 구성

- 중심주제인 ‘외찌’와 관람객이 해당 정보에 대해 대화하며 이해하는 대화형 콘텐츠임

- 시나리오DB는 CMS(Content Management System)를 통해 관리함

○ 보조전시 구성 (전시유물 연계 중심)

- 전곡선사박물관 소장 ‘외찌 복제유물’과 직접 연계하여 운영할 수 있는 콘텐츠 제작

- 기존 복제유물과 유기적 관계로 전시정보를 전달할 수 있도록 혼합현실(MR)·미디어아트 등의 실감콘텐츠 기술을 선정 후 개발하며, 이를 운영할 수 있는 개별 디스플레이 구축

3) 실감콘텐츠 운영 복합체험공간 구성

○ 관람객을 압도할 수 있는 대형화면을 통한 고화질 영상과 대화형 인터렉티브 미디어를 운영하고, 기존 복제유물 콘텐츠와 연계한 보조전시 프로그램을 운영할 수 있는 복합체험공간 구성

○ 스크린부분 외 요소를 개방되어 있는 구성으로 관람객의 자유로운 입출입 가능

○ 운영지원사항 구축

- CMS 구축 : 향후 지속적인 시나리오DB 갱신을 비롯하여, DID시스템 콘텐츠 관리, 운영 등 종합관리 시스템 구축

- DID시스템 구축 : 본체험의 일환으로 다양한 고화질 미디어를 운영가능한 시스템 구축

※대화형 인터렉티브 미디어 및 보조전시는 별도의 운영기기로 구성되어야 함

- 네트워크 및 전시기반 구축 : 실감콘텐츠 운영을 위한 기반구축

Ⅲ. 과업이행 및 결과물

1		과업진행방침

가. 위 구성(안)을 바탕으로 실감콘텐츠와 복합체험공간의 완성도·예술성·사업목적 달성을 고려하여 보다 발전시킨 안으로 제안서를 제출하도록 함

나. 사업 목적을 달성하기 위해 구성 전체 혹은 일부에 대한 새로운 콘텐츠 제안도 가능. 단, 아래 내용은 반드시 충족해야 하며 추후 해당 콘텐츠가 박물관에 적합하지 않을 경우 협상과정에서 콘텐츠 변경을 요청할 수 있다.

1) 주제인 ‘외찌’를 중심으로 콘텐츠 구성

2) 현 ‘외찌’관련 전시유물과 유기적으로 연계된 콘텐츠 구성

3) 사업대상이 위치하는 고고학체험실 Interscope의 인테리어 디자인과 유기적으로 연계되는 공간 디자인 및 구성

다. 실감콘텐츠에 활용되는 모든 미디어 요소는 4K(3840×2160) 이상의 해상도를 지원해야 하며, 이를 운용할 미디어 기기는 총 해상도에서 4K급 운영을 지원해야 한다.

※미디어 기기에 대한 세부사항은 콘텐츠 제안과 협상을 통해 구성함

라. 실감콘텐츠의 정상적인 구동을 위해 수반되는 모든 설비(구조물, 서버 구축, 전시, 통신, 소방, 기계, 기기, 조명 등)에 대한 계획과 시공·설치도 과업에 포함됨

마. 모든 전시물 및 공간은 어린이와 장애인이 이용하기에 안전하고 불편이 없도록 동선 및 규모를 결정해야하며, 주요 마감재는 KS규격품으로 하고 어린이가 활용하는 시설임을 감안하여 소방, 방재, 안전시설을 엄격하게 계획하고 관련법규를 준수하며 자재 선정 시 친환경 자재와 무해 성분 자재를 우선 선정하도록 함

바. 기기와 시공에 사용되는 모든 부품은 추후 교체가 가능하도록 호환성을 고려하여 선정함

사. 콘텐츠에 사용되는 모든 자료, 사진, 영상, 소프트웨어에 대한 법률 검토를 사전에 완료해야 하며 제3자와의 저작권 등 저작권법에 의해 보호되는 권리, 소유권, 초상권 등 법정 분쟁의 책임은 일체 과업수행자의 책임임

아. 본 과업을 통해 개발된 모든 산출물에 대한 저작권, 지적재산권, 소유권 및 판매권 등 모든 권리와 권한은 과업수행자가 발주처에 납품한 시점부터 발주처에 귀속됨

자. 실감콘텐츠 시스템의 보안을 위하여 아래와 같이 실감콘텐츠 네트워크를 구성해야 함

차. 그 밖에 과업목적 달성에 필요하여 발주기관이 요구하는 모든 사항은 본 과업에 포함됨

카. 계약일 후 20일 내 실감콘텐츠 시나리오와 복합체험공간 설계안, 시방서를 작성하여 제출해야 함. 시나리오·설계안·시방서 제출 후 7일 이내 해당 사항에 대한 발주기관의 검토를 받은 후, 실감콘텐츠 제작과 복합체험공간 시공을 진행해야함

2		과업수행보고

가. 과업수행자는 과업수행에 따라 아래와 같이 보고를 수행해야 함

1)주간공정보고(격주) : 사업이행자는 사업수행사항을 격주로 발주처와 협의된 지정 요일에 주간업무보고서(격주)로 제출하여야 함

2)착수보고 : 계약체결 후 7일 이내 사업에 착수하여야 하며, 착수계 제출 시 발주처와 1차 업무협의 및 착수보고를 하여야 함

3)중간보고 : 실시설계 완료 후, 중간보고를 하여야 함

4)수시보고 : 발주처의 요청 및 주요결정사항에 있어 필요한 경우 수시 보고하여야 함

5)시험보고 : 준공일 2주 전 시범 운영을 실시한 뒤 결과를 보고하여야 함

6)최종보고 : 준공일 7일전까지 사업수행결과에 관해 보고하여야 함

※ 위 일정은 발주처와의 협의에 따라 일부 변경될 수 있음

나. 고증을 위한 자문수당 및 시범운영에 따른 자료·장비 등은 과업수행자의 부담으로 준비하여야 하며, 과업수행 책임자가 설명에 임해야 한다.

다. 우리 재단은 시험보고 시 필요사항을 수정·보완 지시할 수 있으며 과업수행자는 즉시 수정·보완하여야 한다.

3		최종 성과품(납품물)

가. 실감콘텐츠와 복합체험공간

나. 모든 콘텐츠 관련 S/W 및 구동 H/W 설비 일체

다. 종결 보고서(A3 제본) 3부

라. 제작 설명서(A3 제본) 3부

마. 설계 도면(A3 제본) 3부

바. 시방서

사. 최종 내역서

아. 운영자 매뉴얼(S/W 및 구동 H/W 작동, 네트워크와 기본 유지보수 방법 수록)

자. 모든 성과물(도면, S/W, 영상, 그래픽 디자인 파일, 일러스트 등)이 담긴 저장매체(CD 혹은 USB) 3개

- 도면의 경우, CAD 및 PDF 파일 2가지 형태로 제출

- 그래픽디자인파일·일러스트의 경우, 실행파일과 PDF 파일 2가지 형태로 제출

차. 타 발주처가 요구하는 자료

4		기타 유의사항(필독)

가. 사업이행자는 본 사업을 책임 수행하는 관리자를 임명하여 발주처 담당자와 상시 협의를 통해 과업수행

나. 과업수행에 대한 원활한 소통과 행정 업무 지원을 위해 본 사업에 참여하는 사업이행자 측 직원 1인은 주 1회 이상 반드시 박물관으로 출근하여 업무를 진행하도록 함

다. 사업이행자는 일일업무일지를 작성하고 주 1회 발주처에 메일로 보고해야 함

라. 모든 전시물(모형, 영상, 패널, S/W등)에 대하여 반드시 발주처의 승인을 받은 후 제작하도록 함

마. 발주처는 중요한 사안의 결정을 위하여 회의를 소집하거나 전문가의 자문을 받도록 사업이행자에게 요구할 수 있고, 사업이행자는 이에 대한 자문 결과를 보고서로 제출하도록 함

바. 사업이행자는 창작된 모든 성과품과 최종산출물 및 자료의 저작재산권(2차적 저작물 작성권 포함)을 발주처에 양도하며, 발주처의 허락 없이 임의로 이를 소유하거나 복사 또는 외부로 유출시켜서는 안 됨

사. 사업이행자는 창작된 산출물 및 자료에 대한 저작권, 초상권, 소유권 등으로 분쟁이 발생하지 않도록 사전에 해결해야 하며 분쟁이 발생 시 사업이행자가 모든 법적 책임을 짐

아. 하자보증·무상보수기간은 납품일로부터 1년으로 하며 해당 기간 중 발생하는 장애, 오류, 하자 등 발주처의 요구 시 언제라도 무상으로 하자보수 및 기술지원 실시

자. 하자보증·무상보수기간 종료 후에도 발주처와 함께 문제 해결에 최선을 다함

차. 전곡선사박물관은 휴관일(매주 월요일) 제외 상시 운영하는 기관이므로 현장 공사는 최소화하고, 관람객의 이동에 불편을 주지 않는 최선의 현장 보완 작업 후 공사를 진행한다. 현장 출입 방법과 기간은 반드시 사전에 협의하고 발주처의 통제에 따르도록 함

카. 사업 진행 중 필요한 각종 심의, 허가, 협의사항 등에 수반되는 설계 및 자료는 발주처가 필요로 할 시 적기에 제공하고 이에 수반되는 비용은 사업이행자가 부담하도록 함

타. 사업이행자는 사업을 수행함에 있어 요구되는 관련법규의 준수와 법령을 성실히 이행하고 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 발생하는 모든 피해 상황에 대하여 책임을 져야 함

파. 사업이행자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설해서는 안 되며 발주처가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 함

하. 본 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 관련 법률에 따르며 본 지침의 해석 상 이견이 있을 시 발주처의 해석에 따른다.