경기도미술관 돛대형상유리 철거 및 부대공사 설계용역

2 0 2 1 .  05 .

경 기 문 화 재 단

목         차

1. 설   계   설   명   서

2. 예   정   공   정   표

3. 원   가   계   산   서

4. 내        역        서

5. 수   량   산   출   서

1. 설   계   설   명   서

1. 설  계  설  명  서

1.   공  사  명 : 경기도미술관 돛대형상유리 철거 및 부대공사

2.   위      치 : 경기도 안산시 단원구 초지동 667번지

3.    목       적 : 본 과업은 경기도 안산시 경기도미술관 기존건축물 돛대형상유리 지속적인 파손으로 인하여 유지관리상 일부 철거와 부대시설 보수공                       사를진행하여 사용자 및 인근주민이용자의 안전 및 편의를 제공하는 데 그 목적이 있다.

4.   공 사 개 요 :

1) 철거공사 -  돛대형상유리 일부철거, 진입로 확보를위한 화단철거등

2) 보수공사 - 철골페인트, 내부 점검사다리, T=42로이복층유리설치등

5.   건 축 개 요 (기존건축물) :

1) 대지면적 -  10,000.00㎡

2) 건축면적 -   5,942.04㎡

3) 연 면 적 -   8,277.80㎡

4) 건 폐 율 -      59.42%

5) 용 적 율 -      82.78%

6. 관계법령 및 협의

1) 경기도 사전협의하에 면적감소 없이 해체만 적용하기로 함

2) 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제 15조에 의거 100ton 이상 분리발주 해당됨

3) 경기주택도시공사와 사전심의의 반영

→ 마구리 개방창 : 상부3EA , 하부2EA 설치

4) 관급자재

→ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제11조에 의거 추정가격 40억 미만으로 해당사항 없음

5) 공종분리 심의 반영

7. 주요자재 및 소요현황

구 분	품 명	수 량	단 위	비 고
철거	T12강화시스템유리(TPG)	1,676.69	㎡
	화단철거	260.00	㎡
부대공사	철골 페인트 보강	1,036.00/3,453.00	㎡
	내부 점검사다리	2	EA
	T.42 로이복층유리/T,24로이복층유리	100.00/30.00	㎡

8.  설계적용기준

1) 환       율 : 2021년  05월  06일

2) 자 재 시 세 : 2021년  04 월호 조달청 가격정보지 및 2021년  04 월호 종합물가정보지에 의거 산정

3) 노임및 품셈 : 2021년도 상반기 정부 노임기준 및 건설공사 품셈에의거 산정

9.  설계변경조건

1) 설계시 조사불가능한 부분 및 조사후 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경되는 경우

2) 시공결과 추정  실제에 맞추어 변경되는 경우

3) 부분 공정의 협의하에 공사가 변경되는 경우

4) 공법이 변경될 경우

5) 천재지변등으로 인하여 설계변경이 불가피한 경우

6) 시험비 및 차량비는 공기 및 물량에 따라 변경

7) 각종 운반거리 등이 변경될 경우

8) 내역단가의 변경이 있을경우

9) 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

10 . 공사기간

본 공사의 공기는 90 일로 하고 다음의 경우에 한하여 관의 승인을 받아 그 기간을 연장할 수 있다.

1) 공사기간중 강우일수가 평균 강우일수보다 많을 때

2) 천재지변으로 인하여 작업이 불가능 할 때

3) 관의 지시에 의하여 작업이 중단되었을 때

4) 보상협의의 지연으로 공기연장이 불가피 할 때

5) 기타 불가피한 상황이 발생되었을 때

11.  보안대책

본 설계도서는 보안관리 철저를 기하여야 하며 공사 착공후 다음과 같이 보안대책을 이행하여야 한다.

1) 설계도서는 보관함을 감독 지시에 따라 제작하여 보관하여야 한다.

2) 상황실은 관계자 이외의 출입을 통제해야한다.

3) 설계도서는 일반문서와 분리하여 보관하여야 하며 공사현장 이외의 유출되는 일이 없도록 보관관리를 철저히 하여야 하며 준공후 발생부

서에 반납조치 하여야 한다.