심 사 결 과 서

□ 사업개요

○ 공 사 명 : 흥원(주변지역) 정비 및 관리 공사

○ 위    치 : 남양주시 화도읍 창현리 산22-73일대

○ 공사내용 : 주차장조성 2,670㎡, 둘레길조성 1,829m, 펜스설치 426경간 등

○ 공사금액 : 590,000천원(도급액 378,903, 관급액 211,097)

○ 공사기간 : 착공일로부터 40일(요청기관 : 경기문화재단 경기문화재연구원)

□ 심사결과                                          (단위 : 천원)

심 사 대상액	심사액	조 정 액			조정률	비 고
		계	증액	감액
378,903	351,550	-27,353	5,052	-32,405	-7.22%	*관급자재 별도심사

* 조달청을 통한 관급자재 구매는 계약심사 제외.  단, 발주기관에서 자체 구매할 경우는 계약심사 대상임 (계약심사담당관-16828호, '20.12.23. 참조)

□ 주요내용

○ 일위대가 및 단가산출 등 조정 : 16종(증 3종)

○ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정 : 9종

붙임 : 세부 심사내역 1부.

[붙임]

세부 심사내역

■ 일위대가 및 단가산출 등 조정                          (단위 : 원)

공종별 조정 내용	단위	수량	설계금액	심사금액	조정액	비고
○ 이윤 - 요율 : 13.4% → 15% ※ 2021년 원가계산 제비율 적용기준	식	1	30,244,932	30,328,526	83,594	원가 계산서 (증)
○ 가드레일판철거(표준레일(지주간격2m,2W)) - 1일시공량 : 110m → 520m/4m의 50% ※ 표준품셈(토목) 1-8-10, 1-10-27	m	1	1,648	696	-952	산근 3
○ 되메우기및다짐(램머) (백호0.7㎥(100%)) - 래머(80kg)다짐 → 플레이트콤팩터(1.5T) 다짐 ※ 표준품셈(공통) 8-2-10	㎥	1	8,091	4,558	-3,533	산근 8
○ 사토운반(토사) (덤프20톤+백호1.0㎥) - 덤프트럭 적하시간 T3 : 0.8 → 0.5 ※ 표준품셈(공통) 8-2-8	㎥	1	7,439	7,387	-52	산근 9
○ 표토제거 (답구간) - 불도저(19T) 작업효율 E : 0.3 → 0.55 ※ 표준품셈(공통) 8-2-1	㎡	1	413	225	-188	산근 10
○ 보조기층포설및다짐 (기계시공-본선포장) - 특별인부 : 1인 → 0인 - 보통인부 : 1인 → 0인 - 포설공 : 0인 → 2인 ※ 표준품셈(토목) 1-3-3	㎥	1	4,259	4,309	50	산근 13 (증)
○ 데크탐방로 B1.5 - 합판거푸집(6회) → 유로폼(간단) - 잡철물제작설치 → 경량형강철골조 조립설치 (비내력식) ※ 표준품셈(건축) 1-4-4 (공통) 6-3-3	m	1	454,438	312,539	-141,899	일위 5
○ 차선도색/융착식 도료 수동식/신설공사 파선(백색) - 유리알 : 9.06kg → 3.1kg ※ 교통노면표시설치관리메뉴얼(경찰청)	10㎡	1	217,173	206,940	-10,233	일위 11
○ 차선도색/융착식 도료 수동식/신설공사 실선(백색) - 유리알 : 9.06kg → 3.1kg ※ 교통노면표시설치관리메뉴얼(경찰청)	10㎡	1	195,333	185,100	-10,233	일위 12
○ 차선도색/융착식 도료 수동식/신설공사 주차장,횡단보도(백색) - 유리알 : 9.06kg → 3.1kg ※ 교통노면표시설치관리메뉴얼(경찰청)	10㎡	1	230,963	220,730	-10,233	일위 13
○ 차선도색/융착식 도료 수동식/신설공사 문자, 기호(백색) - 유리알 : 9.06kg → 3.1kg ※ 교통노면표시설치관리메뉴얼(경찰청)	10㎡	1	294,813	284,580	-10,233	일위14
○ 차선도색/융착식 도료 수동식/신설공사 실선(황색) - 유리알 : 9.06kg → 3.1kg ※ 교통노면표시설치관리메뉴얼(경찰청)	10㎡	1	236,511	226,278	-10,233	일위 15
○ 데크목교 B2.0xL2.0 - 철골가공조립, 철골세우기, 잡철물제작설치 → 경량형강철골조 조립설치(비내력식) ※ 표준품셈(건축) 1-4-4	개소	1	8,870,549	9,552,387	681,838	일위 25 (증)
○ 로프휀스B W2000*H1200 - 합판거푸집(6회) → 유로폼 ※ 표준품셈(공통) 6-3-3	경간	1	156,047	153,388	-2,659	일위 32
○ 모르타르 1:3 배합 - 재료비 포함 - 보통인부 : 1인 → 0.43인 ※ 표준품셈(건축) 9-1-1	㎥	1	231,956	147,401	-84,555	일위 69
○ 면고르기 - 성토부분 → 성토면고르기 품 적용 ※ 표준품셈(공통) 3-4-1	식	1	1,576,582	567,970	-1,008,612	내역서 토공사 면고르기

■ 가격정보 등을 통한 자재단가 조정                       (단위 : 원)

품명	규격	단위	설계단가	심사단가	조정액	비고
경유	경유,저유황	L	1,317	1311.8	-5.2	유통물가
대형브레이커용치즐	0.7㎥용	본	223,000	220,000	-3,000	물가정보
모래	모래,서울,세척사,도착도	M3	32,000	30,000	-2,000	물가정보
산소가스	기체	L	2.00	1.92	-0.08	유통물가
공업용휘발유	공업용휘발유,무연	L	1,527	1,498.2	-28.8	유통물가
용접철망	용접철망,와이어메시,#8-150*150	M2	2,018	1,920	-98	물가정보
컨테이너하우스	컨테이너하우스,창고용,3.0*6.0*2.6m	개	2,029,980	2,000,000	-29,980	유통물가
시너	시너,KSM6060,1종	L	3,194.44	1,944	-1,250.44	유통물가
아연도각관	100*100*t2.3mm,6.95kg/m	M	11,360	11,080	-280	거래가격