과 업 지 시 서

사 업 명	순회전 [호모 사피엔스 : 진화∞관계&미래?] 전시 연출 용역

2022. 05.

사 업 명	순회전 [호모 사피엔스 : 진화∞관계＆미래？] 전시 연출 용역
주 관 기 관	(재)경기문화재단 전곡선사박물관
사업 담당자	이 서 영	031-830-5610
계약 담당자	서 은 경	031-288-5324

I. 사업개요

1		배경 및 목적

가. 코로나-19 팬데믹, 기후 변화 등 인류사적 위기에 직면한 시기에 극심한 환경변화 속에서도 끈질기게 생존해 온 인류의 진화과정을 관람객이 되돌아보는 기회 제공

나. 국립중앙박물관, 국립중앙과학관과의 협업으로 우리 박물관의 주제인 ‘인류 진화와 선사문화’에 대한 종합적 이해를 관람객에 제공

2		사업개요

가. 사 업 명 : 순회전 [호모 사피엔스 : 진화∞ 관계＆ 미래？] 전시 연출 용역

나. 시설현황

1) 위치 : 경기도 연천군 전곡읍 평화로 443번길 2 전곡선사박물관

지하 1층 기획전시실 및 1층 로비(선사온실) 일부

2) 면적 : 약 105평(기획전시실 252.14㎡, 1층 로비 282.62㎡ 중 약 100㎡) ※ 도면 별도 첨부

다. 사업범위

1) 전시기획에 따른 전시 공간 연출 실시설계

2) 전시 공간 인테리어 및 전시(구조)물 제작, 설치

3) 전시장 내․외부 그래픽 제작, 설치(텍스트 패널, 설명카드, 이미지 패널, 바닥 그래픽)

4) 전시 영상 제작 및 설치

5) 홍보물(포스터, 리플렛 등) 제작, 인쇄 및 설치

6) 전시장 안전관리 및 위기상황에 대한 계획 수립

라. 과업기간 : 계약일로부터 2022년 7월 15일까지

- 전시 연출 납품 완수일 : 2022. 07. 11. 월요일 (개관일 2022. 07. 12. 예정) 까지

- 전시기간 : 2022년 07월 12일 (화) ~ 2022년 10월 10일 (월)

※ 발주기관의 사정에 따라 협의하여 변경될 수 있음.

II. 과업내용

1		과업방향

가. 인류화석과 석기 등 전시물(유물)을 전시함으로써 관람객에게 인류의 기원에 관한 과학적 지식과 흥미를 전달

- 단순한 전시물(유물) 나열 방식의 전시가 아닌 새로운 전시형태 제안

나. 최근 인류 진화의 핵심 논쟁인 호모사피엔스의 연구동향을 파악하여 현생인류의 역사를 새롭게 이해하고 미래를 전망하는 계기 마련

- 전시 주제 및 내용을 효과적으로 전달하기 위해 아날로그적 전시 소재와 디지털 매체(전시 영상 프로젝션 등)를 융합할 수 있는 아이디어 제안

다. 국립중앙박물관, 국립중앙과학관과 공동개최하는 순회전시의 의미를 살려 기존 전시 콘텐츠를 적절히 재구성

- 발주기관의 상황과 기획의도에 맞는 공통 전시콘텐츠의 창의적 재구성(안) 제안

2		과업범위

가. 주요 과업 내용

1) 전시 기획 및 디자인

- 첨부된 전시계획을 참조하여 전시물 및 공간 세부 기획 및 디자인

- 전시 공간 디자인 : 바닥 및 구조물을 포함한 일체 공간 디자인

- 전시 그래픽 디자인 : 전시실 내・외부 그래픽 디자인(패널 및 시트)

- 전시 홍보물 디자인 : 포스터, 리플렛, 웹 배너 디자인 및 제작・인쇄

2) 전시 공간 조성 공사

- 전시 기획안에 따른 전시 공간 조성, 인테리어, 전시 연출 실시설계 및 설치

- 전시 구조물, 받침대, 전시대, 그래픽 시공

3) 전시 영상 제작・설치・구현

- 전시 영상 제작 : 인트로 영상, 메인 영상, 아웃트로 영상

- 전시 영상 기기 설치 : 각 영상 특성에 맞는 성능의 영상 및 음향 기기 설치

- 전시 영상 구현 : 영상 구현 프로그램 적용 및 구현(완료 전 시운전 필수)

4) 전시장 안전․보건 관리 및 매뉴얼 수립

나. 과업수행 일정(안)

	개막4주전	개막3주전	개막2주전	개막1주전	개막전일
전시 공간 디자인
전시 그래픽 디자인
전시 홍보물 디자인・제작
전시 공간 연출・시공
전시 영상 제작
전시 영상 기기 설치
전시 영상 구현

- 과업수행 일정에 따라 각 과업 수행 완료 및 발주기관 감독관의 검사 필수

※ 발주기관의 사정에 따라 전시개막일 변경 시 협의 가능

다. 장소 및 면적

1) 설치장소 : 전곡선사박물관 지하 1층 기획전시실 / 1층 로비 일부

2) 설치면적 : 약 105평(기획전시실 252.14㎡, 1층 로비 282.62㎡ 중 약 100㎡)

3		과업세부내용

가. 전시 기획 및 디자인

1) 첨부된 전시계획안을 참조하여 각 주제별로 상호 유기적인 체계가 이루어지도록 전시 공간을 기획, 디자인

2) 전시실의 관람 동선이 원활하게 진행될 수 있도록 배치하고 전시실 내부에 이질감 없는 관람객 휴게공간을 배치

3) 전시영역 내부의 피난동선, 비상탈출로, 진출입로 등을 확보하고 관람객 접근이 용이하도록 전시물 설치 및 공간 구성

4) 전시 공간 디자인 제안시 고려사항

- 디자인 제안 공간 : 바닥 및 구조물을 포함한 일체(면적 : 약 105평)

- 공간 구분 및 안전을 위한 구조물 필수

- 전시 주제 및 컨셉에 따른 전체 디자인 기획, 공간 활용계획 수립

5) 전시 주제와 텍스트를 유기적으로 연계하여 관람객에게 효율적으로 전달할 수 있는 내・외부 그래픽 디자인

- 그래픽 패널 및 시트 10장 이상

- 전시를 위한 글씨체, 사진, 그림, 영상물 일체에 대한 저작권 확보

6) 전시의 기획의도를 잘 나타내고 기대와 흥미를 불러일으킬 수 있는 홍보물 디자인 및 제작・인쇄

- 포스터 및 리플렛은 디자인 파일 제출 및 실물 인쇄

- 포스터 : A3 사이즈, 200g 이상 용지로 단면 4도 인쇄 30부 이상

- 리플렛 : A4 사이즈(4단 대문접지), 100g 이상 용지로 양면 4도 인쇄 3,000부 이상

- 웹 배너 : 홈페이지 게시용 세로형, 가로형 2종

※ 홍보물 규격, 디자인 및 내용 등은 발주기관과 협의하여 변경 가능

나. 전시 공간 조성 공사

1) 전시 공간 기획안을 참조하여 전시물을 제작․설치

- 전시 연출에 필요한 받침대, 전시대, 기타 전시 사인물 등은 유물의 특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 하며 전시 성격을 고려하여 연출

- 유물 전시를 위한 진열장은 보안, 안전, 밀폐성, 관리의 편리성 등을 고려하여 제작

- 경기문화재단 ESG경영 및 관람환경을 고려하여 친환경 전시자재 사용

- 공간 구분 및 안전을 위한 구조물 설치

2) 전시실 텍스트 및 그래픽 설치

- 발주기관과 협의하여 전시 구성에 따라 스카시, 시트커팅, 일반인쇄 등으로 제작․설치

다. 전시 영상 제작・설치・구현

1) 전시 주제와 기획의도를 잘 나타내는 전시 영상 제작

- 인트로 영상 : 인류 진화사 중요 사건을 주제로 5건 제작

- 메인 영상 : ‘함께하는 여정’을 주제로 1건 제작

- 아웃트로 영상 : 인류의 미래를 주제로 3건 제작

2) 전시 영상 기기 설치 및 구현

- 전시물의 이해를 돕고 전시 분위기와 조화로우며 관람객의 관심을 집중할 수 있는 전시영상을 전시장 내에 설치하고 원활히 작동할 수 있도록 설비 구축

- 빔 프로젝터 및 렌즈 : 8000ANSI급(1920*1200px) 4대 및 렌즈 4개, 6000ANSI급(1280*800px) 7대, 5000ANSI급(1280*800px) 1대

- 음향시스템 : 300W 이상 스피커 설치 7대

- PC : 영상 구현을 위한 고성능PC 3대 및 기자재 일체(마우스, 모니터 등)설치

- 영상 구현을 위한 관련 프로그램 라이센스 등 일체의 시스템 설치

- 전시 개막 전 시운전을 통해 영상을 차질 없이 구현

※ 전시 영상 기기의 사양은 신제품 출시, 영상 규모 조정 등의 이유로 발주기관과 협의하여 변경 가능

마. 전시 안전․보건 관리 및 매뉴얼 수립

1) 전염병(코로나-19 등) 예방 조치(방역물품 비치 등) 및 기타 안전사고 예방활동 철저

2) 전시 기간 내 종합 매뉴얼 수립

바. 준공도서 및 결과보고서 제출

구 분	규 격	수 량	비 고
설계 및 성과품 도서	A4, 디지털 파일	A4 2부, USB 2ea	기획서, 내역서, 공정표, 단가 및 수량 산출서, 디자인 원본 파일, 최종 납품 품목 리스트 등
성과품 디지털 기록물 (블루프린트)	디지털 파일	USB 2ea	각종 설명패널 및 그림, 사진, 영상, 등 전시물(유물) 원본 이미지 및 미디어 파일 등
홍보물 관련 서류 일체			각종 홍보물(포스터, 리플렛 등) 원본 및 소스

Ⅲ. 과업지침 및 사업수행조건

1		기본지침

가. 일반지침

1) 본 사업의 목적과 제안요구사항, 전시주제, 기본방향, 예산 등 제안서 내용 등을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획되어야 한다.

2) 전시물(유물)은 관련규정 및 제반규정에 적법하게 제작ㆍ설치될 수 있도록 하며, 발주기관의 위상에 맞는 품위 있는 전시설계계획이 되어야 하며, 유사 기획전 또는 전시관과 차별화된 아이디어를 기초로 제안하여야 한다.

3) 공공시설로서 노약자 및 장애인의 편익과 안전성을 도모하는 계획이 반영되어야 하며, 유아ㆍ초등ㆍ청소년 단체관람객의 전시실 관람시 안정성과 교육성이 고려되어야 한다.

4) 공간을 최적으로 활용하고, 전시물(유물)의 점검·유지·보수·운영이 손쉽게 이루어질 수 있도록 시설을 구축해야 한다.

5) 전시 디자인은 예술성, 창작성, 통일성, 기능성을 충족하고 쾌적한 관람환경이 될 수 있도록 계획되어야 한다.

6) 사업수행자는 본 과업과 관련하여 건축, 기계, 전기(조명), 통신, 소방 등 관련분야에 대한 법규를 면밀히 검토, 준수하여야 한다.

7) 사업수행자가 제출한 성과품이 계약서에서 요구하는 수준에 미달된다고 발주기관이 판단하여 추가 보완을 요구할 경우 사업수행자는 이를 성실히 보완하여야 한다.

8) 관람객의 안전을 최우선으로 하며, 체험물의 내구성 및 완성도를 높이면서 향후 모든 전시물(유물)은 종합적 관리, 운영, 유지, 보수가 용이하도록 제작 및 설치하고, 모서리가 생기는 모든 부분에 충격방지 시설을 설치한다.

※ ｢어린이놀이시설안전관리법｣ 등 어린이 시설 안전기준 준수

9) 전시물(유물) 설치 시 전시실의 기본구조가 훼손되지 않는 공법을 사용해야 하며, 관람환경을 고려하여 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 친환경자재를 사용한다.

10) 사업수행자는 각종 납품물 제작에 있어 특허권, 저작권 등 배타적 권리에 대한 문제가 발생하지 않도록 해야 하며, 추후 문제발생시 소요되는 비용은 사업수행자가 부담한다.

11) 전시물(유물) 및 전시 공간은 발주기관에서 제안한 것 외의 다양한 전시제안이 가능하며, 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 한다.

12) 사업수행자가 제출한 성과품이 계약서에서 요구하는 수준에 미달된다고 발주기관이 판단하여 추가 보완을 요구할 경우 사업수행자는 이를 성실히 보완한다.

13) 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행하여야 한다.

나. 보안 및 개인정보보호 지침

1) 사업수행자는 과업수행기간 중 모든 용역사항에 대한 보안 및 개인정보에 대한 책임이 있으며, 관련 규정을 준수하여야 한다.

2) 모든 성과품은 발주기관의 허락 없이 사업수행자가 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

3) 사업수행과정에서 취득한 일체의 정보 및 개인정보를 유출/누설하지 않도록 하여야 하며, 습득한 개인정보처리는 ｢개인정보보호법｣제25호 제1항에 의거 ｢개인정보처리위탁 계약서｣를 작성하고, 과업 수행자는 계약서의 내용에 따라 개인정보처리 및 과업종료 후 ｢개인정보처리 위탁 결과보고서｣를 제출하여야 한다.

4) 사업수행자가 제출한 모든 성과품의 소유권, 저작권, 특허권, 지적재산권은 공동소유가 원칙이나 협의에 따라 달리 정한다.

다. 기타지침

1) 설계도서 납품 시 내역서를 제출하여야 하며, 과잉설계, 부실설계 등의 부분과 변경된 내용에 대하여 발주기관의 요구에 따라 조치하여야 한다.

2) 본 사업의 성공적 추진을 위하여 사업수행자는 투입될 조직 및 인원현황, 업무 분장내역, 업무 추진사항 및 계획 등을 구체적으로 제시하여야 한다.

3) 사업수행자는 총괄 PM 하부에 분야별 전담인력을 구성하여 동시에 공간 설계, 전시물(유물) 제작·설치, 홍보물 제작 등이 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

4) 발주기관이 필요에 의해 과업 발표회 등을 요구할 경우, 사업수행자는 이에 대해 관련자료 등을 준비하여야 한다.

5) 과업 수행 종료 후에는 설계ㆍ제작 등에 대한 결과를 최종보고서(내역서, 디자인 소스 원본 등 포함)형태로 제작하여 계약종료일까지 제출하여야 한다.

6) 사업수행자는 전시설계ㆍ제작ㆍ설치기간 중 발주기관의 기존 시설물의 유지관리, 화재 및 안전사고 등의 예방에 만전을 기하여야하며, 소속직원의 부주의ㆍ고의로 인한 제반사고 발생 시 민ㆍ형사상의 손해 배상 및 책임을 진다.

7) 본 요청서에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 발주기관과 협의하여 수행하여야 하며, 경미한 사항에 대하여 발주기관이 별도의 추가과업이 필요하다고 인정할 경우, 사업수행자는 발주기관의 요구사항에 따라야 하며 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

8) 안전 및 보건 관련 법규에 따라 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하고, 작업 중 발생하는 인적·물적 사고에 대해 책임을 지고 사후 처리를 성실히 이행하여야 한다.

2		세부지침

가. 전시 연출 관련

1) 전시기획안을 참고하여 구성하되, 준비기간 및 예산 등을 고려하여 구현이 불가능한 경우 제안서에 명확한 대안을 제시하여야 한다.

2) 전시물(유물) 및 전시 공간 디자인 시 시공성, 경제성, 향후 활용성 등을 고려하고, 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인 설비와 구성이 되도록 한다.

3) 관람 동선은 원활하고 상호 유기적인 체계가 이루어져야 하며, 전시 공간 내부에 관람객 휴게공간을 고려하여 계획되어야 한다.

4) 전시 공간 구성에 필요한 전시 그래픽은 전시특성이 최대한 나타나도록 디자인되어야 한다.

5) 전시실 천장, 벽, 바닥, 파티션 등의 마감 재료 및 디자인은 주위시설 및 조명과의 조화, 유지 관리의 용이성, 변질 방지 등이 최대한 보장되도록 설계되어야 하며, 수시로 채색과 보수 등 현상 변동을 필요로 하는 설계는 지양한다.

6) 전반적인 색채구성은 공간별 상호 연계성과 차별성이 강조되면서도 전체적 조화를 이루어야 한다.

7) 패널, 설명카드, 배너 등은 전시물(유물)의 안정적이고 무해한 거치ㆍ보존 및 시각 효과와 유지관리의 용이성, 내구성 등을 보장하도록 재질 및 형태, 색채 등이 설계되어야 한다.

8) 전체조명 및 집중 조명은 전시물(유물)의 종류와 전시기법 등을 고려하여 적절하게 선택하여 설치하여야 한다.

9) 전시물(유물)은 전시의 이해를 돕기 위해 사실감 있게 설치 제안하며, 설치장소 및 크기, 재료, 이미지스케치, 연출방법 등을 제안서에 명시한다.

10) 전시 영상물 설치는 전시를 보완하는 개념으로 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인 설비로 구성하여야 하며 네트워크망 구성 등이 필요하지 않은 단순한 설비로 계획되어야 한다.

11) 해당 제안의 적용기술, 최신사양, 적용 사례 등을 구체적으로 제시하고 사업비 내 적용 가능한 것으로 해야 한다.

12) 전시·체험시설 및 전시콘텐츠, 기타 관련 영상 및 장비는 원활한 유지보수와 운영·수정, 기능향상 등이 가능하도록 제시하여야 한다.

13) 전시 공간 시공 및 전시콘텐츠 설치 완료 이후 시운전 및 보완을 통해 정상적이고, 안정된 전시 운영이 가능하도록 하여야 한다.

나. 안전․보건 확보 조치(현장 전시물 설치작업 시)

1) 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 따른 안전계획 및 조치(계획 및 결과자료 제출)

- 안전관리계획서(안전관리책임자 선정, 위험성 평가, 교육계획 등)

- 안전관리비 산정 및 적용

- 위험성 평가(착수 전 사전평가 및 착수 후 수시평가)

- 근로자 안전교육(TBM-작업 전 10분 안전교육․점검) 실시 결과 제출

- 설치 현장 주변 안전조치 및 안전표지

다. 기타사항

1) 전시물(유물) 운영·유지관리 매뉴얼을 작성해야 한다.

2) 전시기간 중 사업수행자는 긴급한 고장장치에 대하여 비상대책을 마련하고 신속한 대처의 의무를 지며, 이에 소홀한 경우는 하자이행을 하지 않은 것으로 간주한다.

3) 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

4) 사업수행자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상치 않는다.

5) 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을 반드시 기재한다.

6) 전시구성과 관련한 기초 자료는 제안자가 조사 및 검토한다.

7) 모든 전시관련 자료(영상비디오, 필름, 사진, 데이터, 그림, 실물 등)의 확보(촬영, 구매, 임대, 지급 등) 및 제안내용 등이 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 사업자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 책임을 져야한다.

8) 그 밖에 과업에 필요하여 발주기관이 요구하는 사항을 성실히 이행한다.

3		사업수행조건

가. 사업수행에 필요한 장비 일체는 사업수행자가 자체적으로 확보하여 수행하여야 한다.

나. 사업자가 제출한 설계도서상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

다. 과업수행 업무보고는 아래와 같이 수행하여야 한다.

1) 착수보고 : 사업자는 계약체결 후 5일 이내에 본 과업에 착수하여야 하며 착수계 제출

2) 중간보고 : 발주자 요청 또는 주요 결정사항에 있어 필요한 경우 수행

3) 최종보고 : 사업 종료 5일 내 최종 보고 수행

단 계	세부 사항 및 일정	제출 자료
착수보고	계약체결 후 5일 이내 사업 착수 및 착수계 제출	사업 착수계
중간보고	발주자 요청 또는 주요 결정 사항에 있어 필요한 경우 수행	도면 및 디자인 파일 등 전시 관련 생산품
최종보고	과업 종료 후 5일 내 최종 보고 수행 결과보고서에는 과업 진행의 잘된 점과 문제점을 정리하고, 향후 개선사항을 도출할 수 있는 방안 포함	최종보고서 준공도서 (과업 관련 생산‧제작된 모든 결과물의 디지털 원본 파일)

라. 설계를 담당하는 총괄책임자 및 공종별 책임자는 제작ㆍ설치 전 과정을 전담하여 관리하여야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있다.

마. 사업자는 본 제안요청서에 따라 제작설계를 수행하고, 성과품 납품은 계약서에 정한 기일에 완료하여야 한다.

바. 전시연출 및 제작·설치 사업수행 중 또는 완료 후에라도 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주기관이 보완을 지시할 수 있으며 소요되는 모든 경비는 사업자가 부담하여 보완ㆍ수정하여야 한다.

사. 본 사업에 필요한 관련 인ㆍ허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한 처리 및 소요비용은 사업자가 부담하여야 한다.

아. 본 사업수행과 관련된 제안서 작성 및 설계비 등 제반 소요비용은 사업자가 부담하여야 한다.

4		최종 성과품(납품물)

가.  [호모 사피엔스 : 진화∞관계＆미래？] 전시 완료계 및 완료사진

나. 전시 설계 및 성과품 도서 일체 2부(하드카피), USB 2EA(디지털 파일)

다. 성과품 디지털 기록물 및 홍보물 관련 서류 일체 USB 2EA(디지털 파일)

5		기타 유의사항(필독)

가. 사업수행자는 본 사업을 책임 수행하는 관리자를 임명하여 발주처 담당자와 상시 협의를 통해 과업을 수행하여야 한다.

나. 과업수행에 대한 원활한 소통을 위해 본 사업에 참여하는 사업수행자 측 직원 1인은 주 1회 이상 박물관으로 출근 혹은 화상 미팅을 통하여 업무를 진행하여야 한다

다. 모든 전시물(모형, 영상, 패널 등)에 대하여 반드시 발주처의 승인을 받은 후 제작하여야한다.

라. 발주처는 중요한 사안의 결정을 위하여 회의를 소집하거나 전문가의 자문을 받도록 사업수행자에게 요구할 수 있고, 사업수행자는 이에 대한 결과를 보고서로 제출하여야한다.

마. 사업수행자는 창작된 산출물 및 자료에 대한 저작권, 초상권, 소유권 등으로 분쟁이 발생하지 않도록 사전에 해결해야 하며 분쟁 발생 시 사업수행자가 모든 법적 책임을 진다.

바. 하자보증·무상보수기간은 전시기간 종료까지로 하며 해당 기간 중 발생하는 장애, 오류, 하자 등 발주처의 요구 시 언제라도 무상으로 하자보수 및 기술지원을 실시한다.

사. 전곡선사박물관은 휴관일(매주 월요일) 제외 상시 운영하는 기관이므로 현장 공사는 최소화하고, 관람객의 이동에 불편을 주지 않는 최선의 현장 보완 작업 후 공사를 진행한다. 현장 출입 방법과 기간은 반드시 사전에 협의하고 발주처의 통제에 따른다.

아. 사업 진행 중 필요한 각종 심의, 허가, 협의사항 등에 수반되는 설계 및 자료는 발주처가 필요로 할 시 적기에 제공하고 이에 수반되는 비용은 사업수행자가 부담하도록 한다.

자. 사업수행자는 사업을 수행함에 있어 관련 법규 및 법령을 성실히 이행하고 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 발생하는 모든 피해 상황에 대하여 책임을 진다.

차. 사업수행자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설해서는 안 되며 발주처가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

카. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제75조 및 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제91조 1항에 해당할 경우 계약을 해지할 수 있다.

타. 본 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 관련 법률에 따르며 본 지침의 해석 상 이견이 있을 시 협의에 따른다.

별첨. 전시 공간 도면 1부(PDF)