과 업 지 시 서

사 업 명	경기도미술관 2022 수장고 중2층 조성 공사

2022. 09.

사 업 명	경기도미술관 2022 수장고 중2층 조성공사
주 관 기 관	(재)경기문화재단 경기도미술관
사업 담당자	김 선 영	031-481-7034
계약 담당자	서 은 경	031-288-5324

I. 사업개요

1		배경 및 목적

경기도미술관 본동 수장고의 포화율을 낮추고 효율적인 작품의 수장을 통해 지속적인 미술작품의 수집 및 기존 소장품의 원활한 관리를 위함.

2		공사개요

가. 공 사 명 : 경기도미술관 2022 수장고 중2층 조성 공사

나. 공사대상 시설현황

1) 위치 : 경기도 안산시 동산로 268 경기도미술관 수장고

2) 면적 : 수장고 입체실 약 45평(153.8㎡)  ※ 도면 별도 첨부

다. 공사범위

1) 구조용 수장대 3대 제작

2) 중2층 설치 공사 (중층 계단 및 난간 설치 포함, 중흥 하부 및 계단 등 조명 설치 및 이설 포함)

3) 기존 중형 수장대 14기 및 기존 일반 수장대 14기 이설 (해체 및 재설치)

4) 시공시 수장고 유지관리 및 작품 보호 계획 수립

5) 현장 안전관리 및 위기상황에 대한 계획 수립

라. 과업기간 : 착공일로부터 45일

- 과업완수일 : 착공일로부터 45일

※ 발주기관의 사정에 따라 협의하여 변경될 수 있음.

II. 과업내용

1		과업방향

가. 수장고용 수납장 제작 납품 시 수장환경에 적합한 자재 및 시공법으로 진행

나. 작품 보관 및 유지관리, 이동, 운송 등 수장 환경을 위해 산업디자인(종합디자인) 및 환경디자인 등을 고려

다. 경기도미술관 2022 수장고 중2층 조성 공사 설계 용역 결과물에 따라 작업

(도면, 시방서, 내역서)

2		과업범위

가. 주요 과업 내용

1) 구조용 수장대 3대 제작

2) 중2층 설치 공사 (중층 계단 및 난간 설치 포함, 중흥 하부 및 계단 등 조명 설치 및 이설 포함)

3) 기존 중형 수장대 14기 및 기존 일반 수장대 14기 이설 (해체 및 재설치)

4) 시공시 수장고 유지관리 및 작품 보호 계획 수립

5) 현장 안전관리 및 위기상황에 대한 계획 수립

나. 장소 및 면적

1) 설치장소 : 경기도 안산시 동산로 268 경기도미술관 수장고 입체실

2) 설치면적 : 약 45평(입체 153.8㎡)

3		과업세부내용

가. 수장고 중2층 조성 공사 시공

1) 첨부된 설계안을 참조

2) 구조용 수장대 3대 제작

3) 중2층 설치 공사 (중층 계단 및 난간 설치 포함, 중흥 하부 및 계단 등 조명 설치 및 이설 포함)

4) 기존 중형 수장대 14기 및 기존 일반 수장대 14기 이설 (해체 및 재설치)

5) 시공시 수장고 유지관리 및 작품 보호 계획 수립

6) 현장 안전관리 및 위기상황에 대한 계획 수립

나. 안전․보건 관리 및 매뉴얼 수립

1) 전염병(코로나-19 등) 예방 조치(방역물품 비치 등) 및 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 따라 안전교육 및 안전조치 교육 등과 관련한 예산 확보 등 안전 계획 및 조치 철저

2) 시공 기간 내 종합 매뉴얼 수립

다. 결과보고서 제출

1) 최종 납품 품목 리스트 및 최종 도면

2) 진행 과정 및 공사 전 후 비교 사진이 담긴 결과보고서 제출

Ⅲ. 과업지침 및 사업수행조건

1		기본지침

가. 일반지침

1) 본 사업의 목적과 설계도면의 요구사항, 수장고 관리 운영의 방향, 예산 등 과업지시서 내용 등을 충분히 숙지하고 현장을 답사하여 조사한 후 현장여건을 고려하여 계획되어야 한다.

2) 관련규정 및 제반규정에 적법하게 제작ㆍ설치될 수 있도록 하며, 소장품 및 수장환경의 원활한 유지 관리를 고려하여 시공이 되어야 한다.

3) 공간을 최적으로 활용하고, 소장품의 점검·유지·보수·운영이 손쉽게 이루어질 수 있도록 시설을 구축해야 한다.

4) 사업수행자는 본 과업과 관련하여 건축, 기계, 전기(조명), 통신, 소방 등 관련분야에 대한 법규를 면밀히 검토, 준수하여야 한다.

5) 사업수행자가 제출한 성과품이 계약서에서 요구하는 수준에 미달된다고 발주기관이 판단하여 추가 보완을 요구할 경우 사업수행자는 이를 성실히 보완하여야 한다.

6) 안전을 최우선으로 하며, 내구성 및 완성도를 높이면서 향후 모든 소장품이 종합적 관리, 운영, 유지, 보수가 용이하도록 제작 및 설치하고, 작품 이동 운송 및 수장고 내에서의 작업자의 행동 반경 등을 고려하여 충격방지 시설을 설치한다.

7) 수장고의 기본구조가 훼손되지 않는 공법을 사용해야 하며, 작품 보존과 유지를 고려하여 포름알데히드가 거의 검출되지 않는 친환경자재를 사용한다.

8) 시공은 발주기관에서 제안한 것 외의 다양한 제안이 가능하며, 지침에 명시되지 않은 사항은 발주기관과 협의하여야 한다.

9) 사업수행자가 제출한 성과품이 계약서에서 요구하는 수준에 미달된다고 발주기관이 판단하여 추가 보완을 요구할 경우 사업수행자는 이를 성실히 보완한다.

10) 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행하여야 한다.

나. 보안 및 개인정보보호 지침

1) 사업수행자는 과업수행기간 중 모든 용역사항에 대한 보안 및 개인정보에 대한 책임이 있으며, 관련 규정을 준수하여야 한다.

2) 모든 성과품은 발주기관의 허락 없이 사업수행자가 임의로 소유하거나 복사 또는 외부로 유출할 수 없다.

3) 사업수행과정에서 취득한 일체의 정보 및 개인정보를 유출/누설하지 않도록 하여야 하며, 습득한 개인정보처리는 ｢개인정보보호법｣제25호 제1항에 의거 ｢개인정보처리위탁 계약서｣를 작성하고, 과업 수행자는 계약서의 내용에 따라 개인정보처리 및 과업종료 후 ｢개인정보처리 위탁 결과보고서｣를 제출하여야 한다.

다. 기타지침

1) 설계도면에 따라 시공하며, 설계 및 시공법 등 변경 등 관련하여 긴급한 사항이 생길 경우, 발주기관과의 협의 및 발주기관의 요구에 따라 조치하여야 한다.

2) 사업수행 종료 후에는 시공 등에 대한 결과를 최종보고서(납품내역서, 진행과정 기록 사진 등 포함)형태로 제작하여 계약종료일까지 제출하여야 한다.

3) 사업수행자는 발주기관의 기존 시설물의 유지관리, 소장작품의 보호와 유지관리보존, 수장환경 유지, 화재 및 안전사고 등의 예방에 만전을 기하여야 하며, 소속직원의 부주의ㆍ고의로 인한 제반사고 발생 시 민ㆍ형사상의 손해 배상 및 책임을 진다.

4) 본 요청서에 명시되지 않은 사항이라도 과업의 원활한 수행을 위하여 필요하다고 인정되는 사항은 발주기관과 협의하여 수행하여야 하며, 경미한 사항에 대하여 발주기관이 별도의 추가과업이 필요하다고 인정할 경우, 사업수행자는 발주기관의 요구사항에 따라야 하며 이에 소요되는 비용을 부담하여야 한다.

5) 안전 및 보건 관련 법규에 따라 안전사고 예방에 최선을 다하여야 하고, 작업 중 발생하는 인적·물적 사고에 대해 책임을 지고 사후 처리를 성실히 이행하여야 한다.

2		세부지침

가. 공사 관련

1) 경기도미술관 설계 용역의 설계 내역 결과물을 참고하여 구성하되, 준비기간 및 예산 등을 고려하여 구현이 불가능한 경우 제안서에 명확한 대안을 제시하여야 한다.

2) 수장환경 공사 시공성, 경제성, 향후 활용성 등을 고려하고, 최신 기법을 통한 안정적이고 효과적인 설비와 구성이 되도록 검토 후 시공한다.

3) 작품 유지관리보수 및 이동 운송이 원활하고 수장 방법 및 환경 등을 고려하여 공사가 진행되어야 한다.

4) 마감 재료 및 디자인은 최대한 작품을 보존하고 유지할 수 있고, 유지 관리의 용이성, 변질 방지, 온습도 및 조도 관리 등이 최대한 보장되도록 설계되어야 하며, 현장 내에서 용접 등을 진행하거나, 과한 충격이 발행하고, 수시로 변동을 필요로 하는 공법은 지양한다.

6) 해당 제안의 적용기술, 최신사양, 적용 사례 등을 구체적으로 제시하고 사업비 내 적용 가능한 것으로 해야 한다.

7) 원활한 유지보수와 운영·수정, 기능향상 등이 가능하도록 제시하여야 한다.

8) 완료 이후 시운전 및 보완을 통해 정상적이고, 안정된 작품 수장 및 작품관리 등 수장고 운영이 가능하도록 하여야 한다.

나. 안전․보건 확보 조치

1) 중대재해처벌법 및 산업안전보건법에 따른 안전계획 및 조치(계획 및 결과자료 제출)

- 안전관리계획서(안전관리책임자 선정, 위험성 평가, 교육계획 등)

- 안전관리비 산정 및 적용

- 위험성 평가(착수 전 사전평가 및 착수 후 수시평가)

- 근로자 안전교육(TBM-작업 전 10분 안전교육․점검) 실시 결과 제출

- 설치 현장 주변 안전조치 및 안전표지

다. 기타사항

1) 과업기간 중 사업수행자는 시공 중 발생할 수 있는 긴급한 사고에 대해 비상대책을 마련하고 신속한 대처의 의무를 지며, 이에 소홀한 경우는 하자 이행을 하지 않은 것으로 간주한다.

2) 제안에 반영될 재료 및 특수재료에 대하여는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수재료를 선택하여야 한다.

3) 사업수행자는 제출한 제안도서에 대하여 모든 책임을 지며 시공도중 제안도서의 미비점이 발견될 시는 수정하여 작업을 해야 하고, 이에 따른 추가비용은 별도로 계상치 않는다.

4) 공사와 관련한 기초 자료는 제안자가 조사 및 검토한다.

5) 그 밖에 과업에 필요하여 발주기관이 요구하는 사항을 성실히 이행한다.

3		사업수행조건

가. 사업수행에 필요한 장비 일체는 사업수행자가 자체적으로 확보하여 수행하여야 한다.

나. 사업자가 제출한 시공 계획 상의 하자로 인하여 손실 또는 피해, 기타 사업 진행상 지장을 초래하였을 경우에는 사업자가 이에 대한 책임을 져야 한다.

다. 과업수행 업무보고는 아래와 같이 수행하여야 한다.

1) 착수보고 : 사업자는 계약체결 후 5일 이내에 본 과업에 착수하여야 하며 착수계 제출

2) 중간보고 : 발주자 요청 또는 주요 결정사항에 있어 필요한 경우 수행

3) 최종보고 : 공사 종료후 계약종료일까지 최종 보고 수행

라. 공사를 담당하는 총괄책임자 및 공종별 책임자는 제작ㆍ설치 전 과정을 전담하여 관리하여야 한다. 다만, 불가피한 사유가 있을 경우에는 발주기관과 협의하여 책임자를 변경할 수 있다.

마. 사업자는 본 제안요청서 및 설계용역 결과에 따라 제작 시공을 수행하여 성과품 납품은 계약서에 정한 기일에 완료하여야 한다.

바. 사업수행 중 또는 완료 후에라도 본 제안요청서 및 계약문서에 규정된 요구조건과 상이하게 완성되었다고 판명되어 발주기관이 보완을 지시할 수 있으며 소요되는 모든 경비는 사업자가 부담하여 보완ㆍ수정하여야 한다.

사. 본 사업에 필요한 관련 인ㆍ허가를 받거나 검사를 받아야 할 경우 이에 대한 처리 및 소요비용은 사업자가 부담하여야 한다.

아. 본 사업수행과 관련된 제안서 작성 및 자재 및 재료, 노무비 등 제반 소요비용은 사업자가 부담하여야 한다.

4		최종 성과품(납품물)

가.  [경기도미술관 2022 수장고 중2층 조성공사] 준공계, 준공도면, 준공사진

나. 성과품 관련 자료 일체 2부(하드카피), USB 2EA(디지털 파일)

다. 성과품 디지털 기록물 및 관련 서류 일체 USB 2EA(디지털 파일)

5		기타 유의사항(필독)

가. 사업수행자는 본 사업을 책임 수행하는 관리자를 임명하여 발주처 담당자와 상시 협의를 통해 과업을 수행하여야 한다.

나. 과업수행에 대한 원활한 소통을 위해 본 사업에 참여하는 사업수행자 측 직원 1인은 주 3회 이상 미술관으로 출근 혹은 화상 미팅을 통하여 업무를 진행하여야 한다.

다. 모든 공정에 대하여 반드시 발주처의 승인을 받은 후 제작 및 진행하여야한다.

라. 하자보증·무상보수기간은 1년까지로 하며 해당기간 중 발생하는 장애, 오류, 하자 등 발주처의 요구 시 언제라도 무상으로 하자보수 및 기술지원을 실시한다.

마. 경기도미술관은 휴관일(매주 월요일) 제외 상시 운영하는 기관이며 공사 대상 공간이 소장품을 수장하는 수장고이므로 현장 공사는 최소화하고, 관람객의 이동에 불편을 주지 않는 최선의 현장 보완 작업, 소장품의 유지관리보존 및 수장환경의 유지를 위한 현장 보완 작업 후 공사를 진행한다. 소장품의 보호, 수장환경 유지, 미술관의 보안과 안전을 위해 현장 출입 방법과 기간은 반드시 사전에 협의하고 발주처의 통제에 따른다.

바. 사업 진행 중 필요한 각종 심의, 허가, 협의사항 등에 수반되는 설계 및 자료는 발주처가 필요로 할 시 적기에 제공하고 이에 수반되는 비용은 사업수행자가 부담하도록 한다.

사. 사업수행자는 사업을 수행함에 있어 관련 법규 및 법령을 성실히 이행하고 관련 법령 등의 저촉 및 미비로 발생하는 모든 피해 상황에 대하여 책임을 진다.

아. 사업수행자는 본 사업과 관련하여 취득한 업무내용에 대해 제3자에게 누설해서는 안 되며 발주처가 요구하는 보안사항을 철저히 준수하여야 한다.

자. ｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제75조 및 ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제91조 1항에 해당할 경우 계약을 해지할 수 있다.

차. 본 지침에서 정하지 않은 사항에 대해서는 관련 법률에 따르며 본 지침의 해석 상 이견이 있을 시 협의에 따른다.

별첨. 공사 설계서, 시방서, 내역서 1부(PDF)